투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	관급자재(강판) 납품기한 연기 요청(개봉고가 성능개선공사)

우리 부에서 시행중인『개봉고가 성능개선공사』에 소요되는 관급자재(강판) 납품기한을 연기 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

□ 납품기한 연기 내역

품 명	식별번호	규 격	단위	수량	계약번호
강 판	20292137	슬래브	톤	1,175.451	총액계약 (2020100F82C00)

- 계약금액: 금948,012,290원(금구억사천팔백일만이천이백구십원)

- 납품기한: 2021. 1. 31.(당초) → 2021. 2. 28.(변경)

- 변경사유: 시설공사 준공기한 연기에 따른 관급자재 납품기한 연기

붙임  합의각서(아스콘) 1부.  끝.

	토목부장
주무관	김구		도시고속도로과장	장수철		토목부장	01/13 김용제
협조자
시행	토목부-793	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-8664	/전송	02-3708-2599	/	neuf@seoul.go.kr	/	부분공개(5)