투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	교통안전표지 원인자부담공사 변경승인(공기연장) 통보「위례신도시 택지 개발사업 조성공사(4공구) 내 위례대로 교통안전시설물 설치공사」

1. *******************180호(2021.1.11.) 및 서울경찰청 교통관리과26943호(2019.10.28.)와 관련입니다.

2. 우리사업소 관내에서 시행하는 위례신도시 택지 개발사업 조성공사(4공구) 내 위례대로 교통안전시설물 설치공사 공기연장에 따른 변경승인 요청에 대하여 원인자 준수사항 및 승인조건 사항을 이행하는 조건으로 승인하오니 공사 시행에 철저를 기하여 주시기 바라며,

3. 관련 유관기관에서는 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 위례신도시 택지 개발사업 조성공사(4공구) 내 위례대로 교통안전시설물 설치공사

나. 공사위치 : 송파구 위례신도시 조성공사 4공구 위례대로

다. 공사기간 : (당초) 승인일 ~ 2020.12.31. / (변경) 승인일 ~ 2021.09.30.

라. 원인자 및 업체현황

구 분	원 인 자	설 계	감 리	시 공 사
표 지	********	*****	*****	*****

마. 변경내용 : 공사기간 연장

바. 변경사유 : 위례대로 시설물 인계인수 지연에 따른 준공기한 연장

사. 승인조건 : 붙임문서6 참조

붙임  1. 공문 1부.

2. 기술검토의견서 1부.

3. 교통안전시설 설치공사 준수 및 조건사항 1부.  끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
수신자	서 울 특 별 시 장(교통운영과장),서울송파경찰서장(교통과장),한국토지주택공사 사장,(주)트래픽스,(주)수호건설
주무관	정영권		주무관	김승곤		기전과장	01/13 배수웅
협조자
시행	기전과-384	(		)	접수		(		)
우	06332	서울특별시 강남구 남부순환로 3142	/	www.seoul.go.kr
전화		/전송		/		/	부분공개(7)