문서번호	기전과-378
결재일자	2021. 1. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	주무관	기전과장
정영권	김승곤	01/13 배수웅

교통안전표지 원인자부담공사 변경승인 검토 보고

「위례신도시 택지개발사업 조성공사(4공구) 내 위례대로 교통안전시설물 설치공사」

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 1. 13.

교통안전표지 원인자부담공사 변경승인 검토 보고

「위례신도시 택지개발사업 조성공사(4공구) 내 위례대로 교통안전시설물 설치공사」

위례신도시 택지개발사업 조성공사(4공구) 내 위례대로 교통안전시설물 설치 원인자부담공사 변경승인 요청에 대한 검토 보고

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 위례신도시 택지개발사업 조성공사(4공구) 내 위례대로 교통안전시설물 설치공사

○ 공사위치 : 송파구 위례신도시 조성공사 4공구 위례대로

○ 공사기간 : (당초)승인일~2020.12.31./(변경)승인일~2021.9.30.

○ 원인자 및 업체현황

구 분	원인자	설계	감리	시공사
표 지	********	*****	*****	*****

□ 검토내용

○ 규제심의 : 서울지방경찰청 교통관리과-26943호(2019.10.28.)

○ 변경사항 : 공사기간 변경

○ 변경사유 : 위례대로 시설물 인계인수 지연에 따른 준공기한 연장

□ 검토의견

○ 한국토지주택공사에서 시행하는 위례신도시 택지개발사업 조성공사(4공구) 내 위례대로 교통안전시설물 설치 원인자부담공사 공사기간 연장 요청에 대하여 승인서류를 검토한 바, 적정하므로 조건부 승인처리하고자 합니다.

붙임  1. 원인자부담공사 변경승인 요청 공문 1부.

2. 기술검토의견서 1부.  끝.