문서번호	공공재생과-333
결재일자	2021. 1. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	공공재생정책팀장	공공재생과장	재생정책기획관		도시재생실장
윤지선	신명승	이동일	양용택		01/13 류훈
협 조

서울로2단계 연결길 통합브랜드 개발 및 안내시설물 제작·설치 용역 기간 연장 검토 보고

2021.1.

도시재생실

(공공재생과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	■	□
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

서울로2단계 연결길 통합브랜드 개발 및 안내시설물 제작·설치

용역 계약 변경 검토 보고

서울로2단계 연결길 통합브랜드 디자인 개발 및 안내시설물 제작·설치 용역 관련 하여 기간 연장에 대해 아래와 같이 변경하고자 함.

Ⅰ				개 요		‘

□ 용 역 명 : 서울로2단계 연결길 통합브랜드 디자인 개발 및 제작·설치 용역

□ 용역기간 : ‘20.6.~’21.2 (8개월)

□ 계약금액 : 908,280천원

□ 계 약 자 : SOAP 대표 권순엽, 장동선

□ 과업내용

○ 서울로2단계 연결길 통합브랜드(BI) 디자인 개발

○ 연결길과 주요거점 공간을 잇는 안내시설물 기획·제작·설치

○ 연계사업 활성화를 위한 협업 및 자문

Ⅱ				추진경위		‘

○ `20.04.01  : 실행계획 방침(도시재생실장)

○ `20.05.29  : 제안서 평가위원회 심의(협상적격여부:적정)

○ `20.06.25  : 용역 계약 및 착수보고

○ `20.08.14/09.01  : 중간보고 및 실무 회의 개최

○ `20.10.28  : 서울로7017~구서울역사 연결 통로 개통식

○ `20.11.19  : 통합브랜드(BI) 최종보고(도시재생실장)

○ `20.11.29  : 브랜드 자문회의 개최

Ⅲ				변경내용		‘

□ 변경내용

구 분	당 초	변 경	증․감	비고
과업기간	`20.06.29 ~ `21.02.28 (8개월)	‘20.06.29 ~ ’21.06.28 (12개월)	용역기간 4개월 증가
계약금액	908,200천원	908,200천원	변동없음

□ 변경사유

○ 코로나19로 인한 관계부서 및 골목건축가 협의 지연

○ 서울로~구서울역사 연결통로 개통에 따른 서울역사 사이니지 기본설계 및 서울로~건물 연결 네이밍 등 추가과업에 따른 기간 소요

○ 브랜드 자문 및 공공디자인 진흥위원회 심의 등 사전절차 진행으로 용역기간 연장 필요

□ 귀책사유

○ 서울특별시

□ 지체상금 부과여부

○ 미부과

Ⅳ				향후계획		‘

○ ‘21. 1월~        : 계약변경 의뢰(공공재생과 → 재무과)

○ ‘21.  2.~3월    : 공공디자인 진흥위원회 심의 의뢰

○ ‘21.  4.~6월    : 안내시설물 제작·설치.  끝.