문서번호	설비부-604
결재일자	2021. 1. 15.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
정찬교		오삼록	01/15 김중영
협조

『남산예장자락 재생사업 전기공사』

현장관리비(공기연장) 지급 및 준공정산 검토보고

2021. 01.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『남산예장자락 재생사업 전기공사』

간접비(공기연장) 지급 및 준공정산(보험료) 검토보고

『남산예장자락 재생사업 전기공사」추진 관련 선행공정(토목) 지연에 따라 공기연장되어 계약상대자가 청구한 간접비 지급과 준공 시 정산항목(보험료 등)에 대한 정산금액 검토하여 보고 드림.

Ⅰ		공사개요

○ 공 사 명 : 남산예장자락 재생사업 전기공사

○ 위    치 : 서울 중구 예장동 3-8일대

○ 규    모 : 지하1층(9,489㎡_버스주차장 및 근생), 상부 공원 13,201m2

- 특고압수전(2,100kw), 주차관제설비, 전등·전열설비, 공원 조명시설 등

○ 감 리 사 : ㈜동성엔지니어링 외 1개사

○ 계 약 자 :  한전사업개발(주) 외 1개사

○ 차수별 계약현황

구분	계약금액	공사기간	비고
총차	**************	`17.8.1~`20.12.30
1차	************	`17.8.1~`18.11.30	준공
2차	************	`18.12.7~`19.12.10	준공
3차	**************	`20.1.6~20.12.31	금회 준공

Ⅱ		추진경위

○ 2017.08.01. : 전기공사 착수

○ 2017.12.08. : 전기공사 1차분 공기연장(증 11개월)

○ 2018.03.05. : 토목공사 실 착공

○ 2018.04.01. : 전기공사 실 착공

○ 2019.11.18 . : 전기공사 총차공사 공기연장(증 12개월)

○ 2020.12.31. : 건설사업관리단 준공검사 및 간접비 검토 보고

Ⅲ		보고내용

[공기연장 간접비 지급]

□ 관련규정 검토

○ 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제75조

- 공사기간 변경으로 인해 계약금액을 조정하여야 할 필요가 있는 경우에는 그 변경된 내용에 따라 실비를 초과하지 않는 범위에서 조정

○ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제1장 제7절 실비산정

- 간접노무비 산출을 위해 연말정산서류, 임금지급대장을 활용할 수 있음

○ 대법원 판례(대법원 2018.10.30.선고)

- 판결취지 : 차수 공사기간 연장없이 총공사기간 연장에 따른 간접비를 인정 할 수 없음

□ 공사기간 변경 및 대상일수 검토

○ 공기연장 내용

구분	공사기간			사유
	당초	변경	증감
1차	`17.8.1~`17.12.31	`17.8.1~`18.11.30	증)11개월	선행공정(토목) 공기연장
총차	`17.8.1~`19.12.31	`17.8.1~`20.12.31	증)12개월	〃

○ 대상일수 검토

구분	대상일수	검토내용
계약상대자 청구	******* *****************	*
건설사업관리 기술인 검토	****** ******************	**************************** ***********************************************

□ 간접비 지급 금액 검토

○ 지급대상 : 현장대리인 1인의 급여(서울시 건설정보시스템 작업일보로 상주 확인)

○ 실비산정

- 계약상대자가 현장대리인에게 지급한 월 급여명세서 반영

- 경비(임대료, 식비, 수도광열비 등) : 계약상대자 청구 안함

구분	계약상대자 청구금액(23개월)	건설사업관리단 검토(8개월)	보고자 검토 (8개월)
기본·상여금	***********	***********	***********
퇴직급여충당금	**********	*	*
4대보험료	**********	*	*
합 계	************	***********	***********
적 용			◎

[보험료, 물가변동 정산]

□ 보험료 및 물가변동 정산

○ 보험료 정산사유 : 미 집행금액 감액(증빙자료 확인)

○ 물가변동 정산사유 : 설계변경 시 물량 감소분 물가변동 미반영

□ 항목별 변경 금액

항목	계약금액	준공금액	증감액
건강보험료	***********	**********	************
노인장기보험료	********	********	*********
연금보험료	***********	**********	************
퇴직공제부금비	***********	**********	************
안전보건관리비	***********	***********	*********
소계(제경비,VAT미포함)	***********	***********	*************
물가변동 정산	************	************	*************
간접비(공기연장)	0	***********	*************
계약금액(3차)	**************	**************	*************

Ⅳ		검토의견

□ 책임건설사업관리기술인 의견

○ ***************************************

****************************************

*********************

○ 보험료, 안전관리비, 물가변동의 증빙자료 확인결과 정산내용이 적절히 반영됨

□ 보고자 의견

○ ******************************************

********************************************

******************************************

***************

○ *******************************위 내용과 같이 전기

공사 간접비 반영하고 보험료, 안전관리비 정산하여 3차공사 준공처리 함이

타당하다고 판단됨.

붙임 : 1)건설사업관리단 검토 자료 1부.

2)시공사 간접비 청구자료 1부.

3)대법원 판례 1부. 끝.