문서번호	생산관리과-577
결재일자	2021. 1. 15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		생산관리과장	생산부장
라승보		신근호	01/15 서대훈
협 조
	기전설비과장			최강욱
	주무관			곽대근
	주무관			김인준

『강북 고도처리시설 확장공사』

공정관리 회의 결과 보고

2021. 1.

생 산 부

(생산관리과)

『강북 고도처리시설 확장공사』

공정관리 회의 결과 보고

『강북정수센터 고도정수처리시설 확장공사』의 안전한 공사추진을 위해 시행한 공정관리 회의에 대한 결과 보고임.

□ 공사개요

○ 기  간 : 2020. 11. 12. ~ 2022. 4. 11. (시운전 6개월 포함)

○ 규  모 : 고도용량 23만톤/일 증설(기존 72만톤/일 → 95만톤/일)

타일부착 및 활성탄충진	하부집수장치 설치	중계시설 및 부대설비
12개지(2,910㎥)	12지(B5.0×L15.0m)	펌프3대, 제어반등 12지

○ 분야별 계약 현황

구 분	공사기간	계약업체	계약금액 (백만원)	비고
건설사업관리	2020. 11. 12. ~ 2022. 4. 11.	㈜제일엔지니어링 외 1	635
토 목	2020. 11. 12. ~ 2022. 3. 11.	세전종합건설(주) 외1	1,620
전 기	2020. 11. 02. ~ 2021. 12. 31.	새롬 E&C	359
기 계	2020. 11. 25. ~ 2021. 12. 30.	㈜신작로	1,667

□ 공정관리 회의 개요

○ 일　시 : 2021. 1. 13.

○ 참석자

- 발주처 : 생산부장, 생산관리과장, 업무담당

- 현  장 : 분야별 건설사업관리인

○ 회의내용

- 20년도 추진 현황 및 21년도 추진계획 보고

- 현장 애로사항 청취, 발주처 당부사항 전달

□ 회의결과

○ ’20년도 추진현황 / ’21년도 추진계획

구 분	’20년도 추진현황	’21년도 추진계획
토 목	‣ 가설사무실 설치 ‣ 공사현장 가림막 설치	‣ 활성탄흡착지 타일시공 (2월 ~ 7월) ‣ 하부집수장치 설치 (4월 ~ 9월) ‣ 활성탄투입 : 12개지중 10개지 (10월 ~ 12월)
전 기	‣ 고․저압 간선공사 ‣ 동력설비 전원공사 ‣ 관급자재 구매(발전기, CCTV등)	‣ 활성탄지/중계펌프 계측제어 공사 (3월 ~ 8월) ‣ 감시제어시스템 개량 (4월 ~ 9월)
기 계	‣ 사급자재 수급 ‣ 밸브(관급, 79대) 구매	‣ 활성탄흡착지 배관 및 밸브 설치 (2월 ~ 7월) ‣ 중계펌프 및 배관 설치 (8월 ~ 11월) ‣ 오존발생기 설치 (10월 ~ 11월)
시운전	-	‣ 시운전 용역 발주 및 계약 (8월 ~ 10월) ‣ 시운전 시행( 10월 ~ )

○ 발주처 당부사항

- 오존에 대한 작업근로자 안전관리 철저

․작업투입전 오존농도 확인 등 현장 안전상태 확인후 작업시행

․특히 공기보다 무거운 오존 특성상 지하 관랑실 작업시 유의

․필요한 개인 안전 장구는 충분히 갖춘후 작업 투입

․작업자 출입 여부를 필히 강북정수센터에 통보 → 오존 운영에 반영

- 작업중 운영중인 활성탄지에 유충이 유입되지 않도록 현장관리 철저

․금년도 우리본부의 최우선 현안은 유충 발생 방지임

․작업자 현장 출입시 방충문 밀폐 철저

․활성탄 투입시 외부에서 유충이 유입되지 않도록 작업 계획 수립

․매일 아침 조회(TBM)시 유충유입 방지에 대한 근로자 교육 시행

- 기 타

․코로나 – 19 예방을 위해 현장근로자 건강체크 철저

․현장사무실 화재예방 철저

․강북정수센터와 원활한 업무 협의를 통해 공사시행

․먼지등 비산물질이 인근 활성탄지로 유입이 안되도록 작업 시행

□ 행정사항

○ 상기 당부사항 건설사업관리단에 전달 및 이행토록 지도/감독

○ ’21년 2월 공정회의 실시

- 시행일 : 2월 26일(매월 마지막주 금요일)

※ 현장 및 발주처 사정으로 부득이 날짜 변경 필요시 상호 협의. 끝.