문서번호	시설개선과-333
결재일자	2021. 1. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설개선과장	체육시설관리사업소장
박희영	이영교	윤정한	01/15 김정열
협 조
	운영기획과장		代곽동훈

수목 전지공사 및 소나무 생육환경 개선공사 추진계획

2021.  1.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

수목 전지공사 및  소나무 생육환경 개선공사 추진계획

잠실종합운동장 버즘나무 사각전지로 관람객에게 볼거리 제공 및 고사지로 인한 안전사고를 예방하고, 소나무 수관조절 등 생육환경 개선으로 안전하고 쾌적한 가로 녹지환경을 조성하고자 함

Ⅰ		추 진 근 거

○ 2017년 ~ 2021년 중기재정계획 (지방재정법 제33조)

Ⅱ		사 업 개 요

○ 사업위치: 잠실종합운동장

○ 사업기간: 2021. 1. ~ 9.

○ 사업규모

- 버즘나무 조형전지 ******************

※ 생육이 빠른 버즘나무 특성상 지속적으로 추진한 사각전지 이후 나무의 크기가 해마다 커져 수형 정비가 필요함(강전지 시행하여 수형 재정비)

⇒ 강전지 후 잎이 늦게 나오고, 잔가지 생성까지 시간이 걸림(2~3년 예상)

- 소나무 생육환경 개선: ********************

□버즘나무 조형전지(사각전지)

□소나무 수관정비

○ 소요예산: 100백만원

○ 예산과목: 시민체육시설운영및관리, 노후체육시설개보수사업, 잠실종합운동장·구의야구공원시설개보수사업, 시설비 및 부대비, 시설비

Ⅲ		발주계획(안)

○사업면허가 달라 업종 분리 발주

- 잠실종합운동장 수목 전지공사: *******

********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

- 소나무 생육환경 개선공사: ****************************

*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Ⅳ		추 진 계 획

○ 2021. 1. ~ 2.  설계(자체) 및 공사 발주(수목전지, 소나무 생육환경개선)

○ 2021. 2. ~ 3.  공사계약 및 착공

○ 2021. 3.        강전지(조형전지) 1회

○ 2021. 5.        소나무 생육환경 개선공사 준공

○ 2021. 9.        약전지(조형전지) 2회, 수목전지공사 준공

※ 주요 행사 관련 필요시 공사 일정 조정

Ⅴ		조 치 의 견

○ 잠실종합운동장 수목 전지공사 및 소나무 생육환경 개선공사를 시행하여 안전사고예방 등 조경수목 유지관리에 만전을 기하고자 함.

붙임 1. 설계서 각1부.

2. 수목전지공사 위치도 1부.  끝.