문서번호	공원시설과-344
결재일자	2021. 1. 15.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	공원부장
이병철		최연호	01/15 김상국
협 조

- 광나루 잠원수영장 노후상수관로 교체공사 -

실정보고서(사토장 변경) 검토 보고

2021. 1.

한강사업본부

(공원시설과)

- 광나루 잠원수영장 노후상수관로 교체공사 -

실정보고서(사토장 변경) 검토 보고

우리 본부에서 시행 중인「광나루 잠원 수영장 노후상수관로 교체공사」의 감독기관(서울시설공단)에서 제출한 실정보고서 검토결과를 보고 드림.

□ 관련 근거

○ 서울시설공단 공사감독1처-211( ̓̕21.1.12.) : 공사실정보고서

□ 공사 개요

○ 공 사 명 : 광나루 잠원수영장 노후 상수관로 교체공사

○ 대    상 : 광나루, 잠원수영장

○ 공사기간 :  ̕20. 7. 6. ～ 21. 5. 30(1차분 7.6~‘21.4.30).

○ 공사주요 내용

- 상수관로 교체 : 3,449m,

- 보도블록 포장 : 21,822㎡

- 화강판석 설치 : 364㎡

- 기타 관로용접 등 1식

○ 도 급 비 : *************************************

○ 계 약 자 : ********************

○ 감독기관 : ***************

□ 실정보고 내용

○ 사토장 변경

(당초 설계된 사토장이 야적공간 포화상태로 반입불가하고 수도권매립지 또한 반입불가로 경기도 화성시로 변경)

- 당초 : 경기도 남양주 와부읍 월문리 99-1(광나루 22km, 잠원 30km))

- 변경 : 경기도 화성시 쌍송리 458(광나루 65.1km, 잠원 55.3km))

단가 : 운반거리는 늘어났으나 계약액조정 없이 기존 계약단가로 시행

○ 변경 세부내역

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

○ 변경 금액 : 없음

□ 검토 결과

○ 시설공단으로부터 제출받은 검토보고서에 대하여 검토한 결과 기존 사토장 반입불가 등으로 인하여 운반거리는 늘었으나 단가변동없이 계약단가로 시행하는 사항으로 적정한 것으로 판단됨

□ 조치 계획

○ 광나루 잠원수영장 노후상수관로 교체공사 추진 중 시설관리공단에서 제출한 실정보고서에 대하여 검토의견과 같이 승인하고 우선 시공 조치하고 추후 설계변경에 차질없도록 서울시설공단에 통보

붙임 : 공사현장 실정보고서 검토보고 1부.  끝.