문서번호	정수시설과-571
결재일자	2021. 1. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
조광호		전훈	01/18 조성태
협 조
	정수과장			유준수
	주무관			김응균

「암사 활성탄지 회수조펌프증설 사업」 기계분야 공사 및 관급자재구매 추진계획

2021. 1.

암사아리수정수센터

「암사 활성탄지 회수조펌프증설 사업」

기계분야 공사 및 관급자재구매 추진계획

활성탄지 적정 역세척 주기 확보를 위한 회수조펌프 증설사업의 적기 추진을 위하여, 기계분야 공사 및 관급자재구매 추진계획을 보고드림.

□ 전체 사업개요

❍ 사 업 명 : 암사 활성탄지 회수조펌프증설 사업

❍ 추진배경

- 생산관리과-351호(2021.1.11.), (암사) 활성탄지 역세척 주기단축관련 전문가 회의결과 및 정비계획 수립 통보

◇ 관계자 자문회의 주요결과

① 펌프용량 증설 : 1,800톤/h ⟹ 1착수정 회수

② 회수관로 부설 : 1정수장 도수관로 2,200/600mm 분기연결 (D600mm, L350m)

※ 공사의 세부사항 (펌프용량 및 관로구경 등) 추진부서 검토 후 시행

- 회수조 구조물 증설 및 비상방류배관 부설은 금회 시행 사업 효과분석 결과에 따라 추후 추진

◇ 협조요청 사항

- 활성탄지 관리 특성을 고려 수온 10℃ 이하에서 공사 시행 (신속한 사업추진)

❍ 소요예산 : 1,473,750천원 (기계 500백만원, 토목 663,750천원, 전기 310백만원)

※ 확보예산 1,249백만원(시설비)으로 부족예산(224,750천원)은 분야별 수선유지비 활용

❍ 사업기간 : ‘21. 1. ~ 5.

❍ 사업개요

- 수중펌프(75kW, 4대)설치관련 기계·전기·제어 설비

- 부단수접합 및 이송배관부설(D600mm, L400m)관련 토목공사

❍ 시설현황(회수조 이송펌프설비)

구분	펌프규격 및 수량	토출배관	최대유량
1 열	4.8m3/min×25mH, 30kW 4대(편흡입 3대, 인라인 1대)	주철관, D300mm, 1배출수/2도수관로(2오니장 앞)	900m3/h
2 열	4.8m3/min×25mH, 30kW 2대(인라인 2대)	주철관, D300mm, 2도수관로(회수조 앞)	300m3/h

□ 기계분야 사업개요

❍ 사 업 비 : 500백만원 (도급공사 266백만원, 관급자재 234백만원)

※ 예산과목 : 자본적지출, 정수센터시설정비, 시설비 및 부대비 (기계장치)

상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지비

❍ 사업기간 : ‘21. 1. ~ 5.

❍ 사업개요 : 수중펌프(75kW) 4대, 배관 및 밸브 설치 1식

❍ 계약대상 및 소요금액

(단위 : 천원)

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

□ 공사계약 및 관급자재구매 추진계획

❍ 기계분야 예정일정표

구분	1월		2월		3월		4월		5월
사전절차 이행 및 발주
관급자재 제작·납품
공사용 자재준비 및 설치공사

※ 관급자재의 평균 납기가 50일로 신속한 사전절차 이행 및 발주, 계약상대자 독려를 통하여 4월초 이전에 모든 관급자재가 납품가능하도록 추진하고, 배관 등 공사용 자재를 미리 준비하여 5월말 이전에 기계분야 모든 사업의 완료를 목표로 추진

① 건명 : 암사 활성탄지 회수조펌프 증설 기계공사

❍ 소요예산 : **********

❍ 계약방법 : ****************

	< 계약방법 관련근거 및 사유 >
❍ 관련근거 ************************ ❍ 사 유 ****************************************************************************************************

❍ 공사기간 : 착공일로부터 90일

❍ 진행일정

- 2021. 1. 설계도서 작성, 계약심사(본부 안전조사과)

- 2021. 2. 발주 및 계약의뢰(본청 재무과)

- 2021. 2. 착공

- 2021. 5. 준공

② 건명 : 회수조펌프 증설관련 수중펌프 제작구매

❍ 소요예산 : **********

❍ 계약방법 : *******************

	< 계약방법 관련근거 및 사유 >
❍ 관련근거 ********************** ************************************** ************************************************************************************************************************** ************************************** ********************************* ****************************

❍ 계약기간 : 계약일로부터 60일

❍ 진행일정

- 2021. 1. 설계도서 작성, 계약심사(본청 계약심사과), 사전규격공개

************************************

- 2021. 2. 발주 및 계약의뢰(본청 재무과)

- 2021. 4. 공장검수 및 현장 납품

③ 건명 : 회수조펌프 증설관련 밸브류 조달구매

❍ 소요예산 : *********

❍ 계약방법 : ************

❍ 구매대상 : 전동BFV(300A) 4대, 전동게이트밸브(600A) 3대, 체크밸브(300A) 4대

❍ 계약기간 : 계약일로부터 50일

❍ 진행일정

- 2021. 1. 특정기술선정심사위원회 개최

- 2021. 2. 발주 및 계약의뢰(행정관리과)

- 2021. 4. 공장검수 및 현장 납품

④ 건명 : 회수조펌프 증설관련 신축관 조달구매

❍ 소요예산 : *********

❍ 계약방법 : ************

❍ 구매대상 : 신축관(600A) 3대, 신축관(300A) 4대

❍ 계약기간 : 계약일로부터 40일

❍ 진행일정

- 2021. 2. 발주 및 계약의뢰(행정관리과)

- 2021. 4. 공장검수 및 현장 납품

⑤ 건명 : 회수조펌프 증설관련 유량계 조달구매

❍ 소요예산 : ********

❍ 계약방법 : ************

❍ 구매대상 : 전자식유량계(600A) 1대

❍ 계약기간 : 계약일로부터 30일

❍ 진행일정

- 2021. 2. 발주 및 계약의뢰(행정관리과)

- 2021. 4. 공장검수 및 현장 납품

□ 행정사항

❍ 협조사항

- 원활한 공사를 위한 활성탄지 역세척 운영 조정 및 회수조 준설(정수과).

붙임 : 예산 집행 예정 내역(암사 활성탄지 회수조펌프증설 사업) 1부.  끝.