“기분 좋은 변화, 품격 있는 강남”

등록번호	공원녹지과-1316		주무관	공원기획팀장		공원녹지과장		도시환경국장		부구청장
			강규이	주동희		김현경		안재혁		01/18 안준호
등록일자	2021.1.15.
결재일자	2021.1.18.
공개구분	대시민공개
			협조자		재무과장		지영애
					계약팀장		한혜란
					주무관		김경식

2021년 도곡근린공원 공원燈 정비계획

2021. 1.

	강 남 구
(		공원녹지과	)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】
검토분야	확인 및 적시사항
관련 규정 및 근거	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?
	•「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」
추진 경위	추진 경위는 무엇입니까?
	• 도곡근린공원 주요 산책로에 공원등이 없는 구간이 있어 공원등을 설치하고자 함.
예산 사항	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?
	• 구비 확보
수혜자 및 범위	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?
	• 대상 : 인근주민 및 이용자
분 야 별 검토사항 [계속 : ] [신규 : ]	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? ⓛ 관련부서 협조 ----------------- ( ○ ) ② 이해관계인 및 에상되는 민원 ----------------- ( ○ ) ③ 추진상 사전 걸림돌 ----------------- ( ) ④ 미래행정 수요예측 ----------------- ( ) ⑤ 시장조사 ----------------- ( ) ⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 ------ ( ) ⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----------------- ( ) ⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ----------------- ( ) ⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ----------------- ( )
	• 위 언급한 사항은 반드시 검토하고 해당되는 사항에 체크한 다음, 해당 사항을 요약 작성하세요
타 기관 사 례	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?
	• 해당없음
전문가 자 문	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?
	• 해당없음

2021년 도곡근린공원 공원燈 정비계획

도곡근린공원 양재전화국 사거리 입구에서 진입하는 산책로 일부구간에 공원등이 없어 야간이용시 위험하므로 공원등을 설치하여 안전한 공원에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진 개요

▢ 대 상 지 : 도곡근린공원 양재전화국 진입로~약 200m 구간(도곡동 산39-3일대)

▢ 추진기간 : 2021. 1. ~ 6.

▢ 추진내용 : 공원등 부재구간 신규 공원등 설치(10본)

▢ 소요예산 : 금46,364,330원(구비)

▲설치 위치	▲현황사진

Ⅱ		추진 방법

▢ 건   명 : 2021년 도곡근린공원 공원등 정비공사

▢ 정비내역 : 공원등 10본 설치, 분전함설치, 한전인입 등

▢ 공사기간 : 착수일로부터 60일

▢ 계약방법 및 소요예산

구 분		금액(원)	계약방법	비고
총공사비		46,364,330
도급비	공급가액	19,732,728	수의계약 (수의계약시스템을 활용하여 선정)	「전기공사업법」에 의한 ‘전기공사업’ 등록업체
	부가세	1,973,272
	계	21,706,000
관급자재		23,979,630	조달구매
한전 표준시설부담금		678,700	고지서 납부

▪ 수의계약사유 : 금액이 소액이며, 공원등 설치공사 경험이 풍부한 전문업체와 계약하여 신속하게
공사를 추진하고자 함.

▪ 수의계약근거 : 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」시행령 제25조 제1항제5호

▢ 예산과목 : 공원녹지과, 도시개발, 공원조성 및 정비, 산지형공원 노후시설물 보수정비, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임 1. 공사설계서 1부. 끝.