문서번호	시설관리과-1136
결재일자	2021. 1. 19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	시설안전팀장	시설관리과장		남부수도사업소장
오영진	이승영	고신석		01/19 박병성
협 조
	급수운영과장		代서규석
	주무관		류태현

2021년 노후밸브 정비계획

2021. 1.

남부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

2021년 노후밸브 정비계획

상수도 밸브의 내구성 향상 및 깨끗한 수돗물을 안정적으로 공급하기 위한 2021년 노후밸브 정비 추진계획을 보고 드림.

Ⅰ				관련 근거

❍ 상수도 밸브 종합관리계획(본부장 방침 제117호, 2007. 7. 3.)

❍ 노후밸브 정비 중장기 추진계획(본부장 방침, 2016.10.10.)

❍ 2021년 노후밸브 정비 추진계획(본부시설과-10420, 2020.12.30.)

Ⅱ				사업개요(총괄)

❍ 사업내용 : 고장 또는 녹물발생 우려가 있는 `94년 이전 회주철밸브 정비

❍ 사업대상 : 10,037개소

❍ 사 업 비 : 64,115백만원(사업기간 `08년 ~ `27년)

❍ 연차별 투자규모                             (단위: 개소, 백만원)

구 분	총계	기투자(～’20)			추진 계획
		소계	∼’19	’20	소 계	’21	’22~
정비수량	10,037	7,072	6,667	405	2,965	152	2,813
사 업 비	64,115	32,169	29,831	2,338	31,946	1,227	30,719

Ⅲ				2020년 정비실적

❍ 정비 실적 : 405개소(목표 380개소 107% 정비)

❍ 예산 집행 : 2,338백만원

목 표	정비 실적					비 고
	과별	노후밸브			노후소화전
		소계	제수밸브	기타밸브
380	소 계	405	389	16	200	107% 달성
	급수운영과	199	190	9	88	105% 달성
	시설관리과	206	199	7	112	108% 달성

※ 노후 소화전 정비실적은 목표 대상이 아님.

Ⅳ				2021년 노후밸브 정비계획

□ 제수밸브 현황

※ 본부통계자료 통계자료(`20.12.31.) 미비로 남부수도사업소 자체 GIS자료(`20.12.30.)활용

❍ 제수밸브 34,594개소 중 2,965개소 노후밸브(8.6%)

구 분	계(남부)	관악구	금천구	동작구	영등포구	비 고
제수밸브	34,594	10,497	5,450	7,605	11,042
노후밸브	2,965	1,137	571	447	810

※ 노후밸브 : 1994년 이전에 설치된 회주철 재질의 밸브

❍ 구경별 노후 제수밸브 현황

구경 계	80㎜	100㎜	150㎜	200㎜	250㎜	300㎜	400~2200㎜
2,965	452	1,744	216	206	28	121	198

□ 추진 방향

❍ BSC 성과관리사업의 분기별 정비 목표관리 시행

⇒ 사업소 경영실적 평가에 반영되며, 분기별 목표관리(붙임1)

❍ 소·중블록 단위의 노후밸브를 일제 정비 추진

- 재개발·재건축 대상지 제외

- 노후 상수도관(송배수관, 배급수관) 정비 대상구간은 해당사업으로 정비

❍ 대구경(D=400mm이상) 노후밸브 우선 정비 추진

- 남부수도사업소 현황 : 198개소(붙임2)

- 밸브별 우선순위 결정하여 정비계획 수립 및 밸브교체 시행

○『대형 제수밸브 점검정비 용역』결과 지적사항은 우선 정비

○ 대규모 단수로 인한 민원 예상 지역은 부단수공법을 활용

⇒ 단가계약사업 발주시 부단수공종 반영(필요시 단위사업 발주)

○ 소방재난본부 관리대상 소화전용 노후밸브 정비

- 교체대상 : 200개소

- 예산 : 400백만원(사업소 240백만원, 자재 160백만원)

- 노후 상수도관(송배수관,배급수관) 정비, 소블록 배급수관망 개선, 단가계약(시설물 보수및설치, 급수공사)에 반영하여 정비

- 지하식소화전밸브실은 적벽돌쌓기가 생략된 ‘소화전실(축소형) 설치

- ‘소화전 설치·보수’ 사업의 예산과 구분되므로 분리 집행

□ 정비 계획

❍ 정비 목표 : 노후·고장 밸브 152개소, 소화전용밸브 200개소

❍ 소요 예산 : 1,627백만원(노후밸브:1,227, 소방:400)

❍ BSC 성과관리 대상사업으로 분기별 목표량 설정

구 분	계	1분기	2분기	3분기	4분기
계	152	15	46	61	30

※ 노후밸브만 해당됨

❍ 과별 정비목표 : 균등분배

구 분	계	급수운영과	시설관리과	비 고
목표(개소)	152	76	76	소화전용밸브 : 200개소
예산(천원)	1,227,000	613,500	613,500	소방예산 활용

❍ 년차별 노후밸브 정비계획

구분	계	`21년	`22년	`23년	`24년	`25년	`26년	`27년
계	2,965	352	449	434	424	440	412	451
400mm이상	198	25	27	29	29	29	30	29
400mm미만	1,408	127	232	215	205	221	193	215
소화전밸브	1,359	200	190	190	190	190	189	210

□ 정비 시 준수사항

❍ 단수 범위 축소의 경우 중간밸브 설치 및 부단수 교체공법 등 검토

❍ 고장밸브를 우선하여 교체하고 1994년 이전에 설치된 회주철 재질의 노후밸브를 교체

❍ 대형 제수밸브 점검정비 시 지적사항은 우선 정비

- 정비대상은 용역 성과품 참고 (본부 시설관리과-2640, 2019. 3. 15.)

❍ 시공성, 경제성을 개선한 재생복합수지 원형 밸브실 및 매몰형 중형 밸브실 활용

❍ 노후 밸브의 기능을 검토하여 기능상 필요가 없을 경우 철거

❍ 수도관망의 체계적인 관리를 위하여 블록(소블록, 중블록) 단위로 정비

❍ 재개발, 재건축 및 배관정비 예정 구간의 노후밸브 교체 금지

Ⅴ				행정 사항

❍ 우리사업소 자체정비계획 수립후 본부 시설과에 보고

❍ ‘노후밸브 정비’ 실적 월보 제출 : 사업소 시설관리과 (익월 10일까지)

- 사업소별 분기 목표수량 고려하여 정비

❍  ‘소화전용 노후밸브’ 정비 실적 제출 : 사업소 시설관리과(분기별)

- 전분기 실적을 다음분기 시작 월 10일까지 제출

붙임: 1. `21년 ‘노후밸브 정비’ 사업소별・분기별 목표관리 현황 1부.

2. 400mm이상 노후밸브 정비대상 1부.

3. `21년 ‘노후밸브 정비’ 실적 제출양식(월보) 1부.

4. `21년 ‘소화전용 노후밸브’ 정비 제출양식(분기) 1부.

5. `20년 소화전용 노후밸브 정비실적 1부.

6. 년차별 노후밸브 정비계획 1부.  끝.