문서번호	수집연구과-363
결재일자	2021. 1. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		수집연구과장	서울공예박물관장
고미경		김수정	01/19 김정화
협조

「2020년 공예 소재·공정 아카이브 연구 및 표본 제작」

용역 추진현황 검토결과 보고

2021.01.19

서울공예박물관

(수집연구과)

「2020년 공예 소재·공정 아카이브 연구 및 표본 제작」

용역 추진현황 검토결과 보고

서울공예박물관이 추진 중인 「2020년 공예 소재·공정 아카이브 연구 및 표본 제작」용역 추진현황에 대한 검토결과와 향후계획을 보고드림.

□ 사업 개요

○ 용역기간 : ’20.07.28.~’21.01.31.

○ 수행기관 : 서울과학기술대학교 산학협력단

○ 사업내용

❶ 백자의 소재‧공정 표본 체계의 구성과 제작,

❷ 표본을 담아 전시․교육 등에 활용 가능한 공예 상자 제작

❸ 표본키트 체계와 개별 표본들에 대한 공예사적 맥락에서의 해제 및 기술, DB화

❹ 표본과 공예상자 등 제작 과정에 대한 기록화(사진, 영상 촬영 등)

○ 계약금액 : 금104,500천원

□ 그동안 진행사항

○ ’20.11.06.(금) 중간보고 및 전문가 자문회의

- 표본 및 표본상자 설계 컨셉안 : 3개 컨셉 중 A안(이동식 확장형) 채택

○ ’20.11.26.(목) <백자공예상자> 1차 설계안 검토회의

○ ’20.11.27.(금) <백자공예상자> 1차 설계안 서면자문(수집연구과-7980, 20.12.02.)

- 자문의견 : 소재, 공정을 분리․수납하여 2개 상자로 설계*******************

○ ’20.12.02.(금) 용역 변경계약 체결 계획(수집연구과-7987)

- 변경내용 : 준공기간 연장, 계약금액(금9,500천원 증액)

- 변경사유 : 코로나19에 따른 작업지연, 물량변동

○ ’20.12.11.(금) 용역 변경계약 체결 완료

○ ’21.01.11.(월) <백자공예상자> 2차 설계안 제출 및 검토 <붙임 1>, <붙임 2>

○ ’21.01.14.(목) <백자공예상자> 2차 설계안 서면자문 <붙임 3>

- 자문의견 : 다양한 전시환경을 고려, 이동성과 내구성을 겸비할 수 있도록 돌출형 지지대의 작동 구조 변화 가능성을 검토하고, 상자 자체의 독립형 전시 가능토록 소제목과 설명 그래픽 면적 추가 확보 필요*******************

○ ’21.01.17.(일) <백자공예상자> 3차 설계안 제출 <붙임 4>

□ 과업 추진 현황

○ 검토기간 : ’20.12.~ ’21.1.11.현재

○ 용역기관 과업 추진 현황 : <붙임 5> 참조

- 표본 세부 내역 조정 : 일부 수량 축소, 장식기법 표본 치수 상향 등

- 백자공예상자 설계안 : 기존안을 수정한 2안, 3안 2개 설계안으로 제작

연번	백자공예상자 설계 제안			검토 및 자문의견
1차 기본 컨셉 제안	*			중간보고 1차 설계안 (수집연구과-7980, 20.12.02.)
2차 수정안	********************************************************************************************************			수정설계: <붙임 1> 검토의견: <붙임 2> 자문의견: <붙임 3>
3차 수정안	***************** **************************************** ****************** ****************** *******************	******************************************* ****************** ****************** ******************	******************* ******************* ******************** *******************	<붙임 4> ******* ***** ***** ***** *****
	***	***	**

- 코로나19 여파로 불가피하게 제작 일정이 지연되어 준공기간 연장이 필요함.

	과업 지연 사유
①코로나19로 인해 현지조사 및 외주작가 대면이 요구되는 일부 표본 제작이 연기되어 후속 작업(표본 분석 및 해제, 공예상자 설계 확정)이 지연되었음. ②코로나19로 공예상자 제작에 필요한 수입산 자재의 수급이 늦어져 공정 지연에 따른 준공기한 연장이 필요함.

□ 부서 검토의견

○ 표본 세부 내역 최종 협의

실물 제작과정의 문제점을 보완하여 일부 표본 첨삭, 표본 크기 확정 ※ 최종 납품수량은 1차제작 완료 후 확정함.

- 양각기법 : (현안)국립중앙박물관 <계영배> 매화문 표본 1점(영상 촬영)

⇒ (수정) 당초 협의에 따라 공예박물관 <계영배 잔탁> 학문 1점(영상 제외),

완성된 매화문 1점(영상 포함) 총 2점 납품

- 동화기법 : (현안) 환원소성 표본 1점

⇒ (수정) 소성에 따른 변화가 시각화되도록 환원소성, 산화소성 표본 각 1점(총2점) 제작

○ 백자공예상자 설계안

검토의견 및 자문의견 반영, 2종 설계안을 채택하여 소재상자(2안), 공정상자(3안)를 각각 제작함

- 세부 디자인 수정 및 보완하여 최종 설계도서를 보고 후 실물제작 : 설명 그래픽면 배치, 소재상자 하단 서랍형으로 수정하여 활용성 제고 등

○ 아카이브 DB 구축 및 보고서 작성

- 최종 보고서 : 박물관과 향후 협의 후 보완

- 자료작성 체계(식별번호 부여 체계 등) : 박물관과 향후 협의

○ 공예상자 제작 일정 지연에 다른 준공기간 연장

⇒ 과업 완수 및 성과품의 완성도 제고를 위해 준공기한을 연장함

□ 향후 일정

○ ’21.01.19.~20. : 2차 변경계약 계획 수립 및 변경계약 의뢰

○ ’21.01.29. : 표본 제작 완료, 공예상자 최종 디자인 확정, 설계도서 제출

○ ’21.02.05. : 공예상자 제작 진행, 성과품 작성(목록화 및 데이터 입력)

○ ’21.02.22.~26. : 최종 보고회 개최

○ ’21.02.22.~26. : 최종 데이터, 최종보고서 제출 및 검수

○ ’21.03.05. : 공예상자 납품(운송)/ 현장 설치

□ 행정사항

○ ’21.01.22. : 2차 변경계약 체결 의뢰(수집연구과 → 총무과)

붙임 1. <백자공예상자> 2차 설계안 1부.

2. <백자공예상자> 2차 설계안 검토의견 1부.

3. <백자공예상자> 2차 설계안 자문의견 1부.

4. <백자공예상자> 3차 설계안 1부.

5. 과업수행 현황보고(21.01) 1부.   끝.