투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	계약 변경(준공기한) 의뢰(동북권 아동청소년 예술교육센터 및 종합체육센터 건립 전기공사)

우리본부(설비부)에서 시행 중인『동북권 아동청소년 예술교육센터 및 종합체육센터 건립 전기공사』에 대하여 아래와 같이 계약변경(준공기한) 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 공 사 명 : 동북권 아동청소년 예술교육센터 및 종합체육센터 건립 전기공사

2. 공사위치 : 서울특별시 강북구 미아동 811-2

3. 계약업체 : ********************************

4. 계약금액 및 기간

구 분	계 약 금 액(원)	계 약 기 간	비 고
총 차	*************	2020. 3.24. ~ 2022. 9.30.
1 차	***********	2020. 3.24. ~ 2021. 1.31.

5. 준공기한 변경(연장) 내역

가. 변경사유 : 선행공정(건축공사) 암반굴착공정 지연 등으로 후속공정인 전기공사 1차수 준공기한 연장

나. 준공기한 변경(연장)

구 분	계 약 금 액(원)	계 약 기 간		비 고
		당 초	변 경
총 차	*************	2020. 3.24. ~ 2022. 9.30.	2020. 3.24. ~ 2022. 9.30.
1 차	***********	2020. 3.24. ~ 2021. 1.31.	2020. 3.24. ~ 2021. 6.30.	증150

※ 계약금액 변경 없음

다. 귀책기관 : 서울특별시 도시기반시설본부(지체상금 미부과)

라. 예산과목

- 서울시 : 문화시설과, 문화도시기반조성, 문화예술시설 건립, 아동청소년 예술교육센터 건립 지원, 시설비

- 강북구 : 문화관광체육과, 체육시설 확충, 체육시설 관리, 강북구 종합체육센터 건립, 자치단체등이전, 자치단체간부담금

붙   임 : 1. 합의각서 1부.

2. 준공기한 연기 보고서 1부.

3. 감리단 준공기한 연기 요청 공문 1부. 끝.

	설비부장
주무관	전상은		건축설비과장	김은덕		설비부장	01/20 김중영
협조자
시행	설비부-870	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 15F 도시기반시설본부 설비부 (무교동)	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8628	/전송	02-3708-8659	/	jun5209@seoul.go.kr	/	부분공개(5)