문서번호	도시철도사업부-602
결재일자	2021. 1. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관		공정관리과장		도시철도사업부장
원길묵		최문기		01/20 이철
협 조
	주무관				이덕배

- 신림선 도시철도 민간투자사업 전면책임감리용역(2공구) -

물가변동 등으로 인한 계약금액 조정 검토

(총괄 10회, 5차 1회)

2021. 1.

도시기반시설본부

(도시철도사업부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

- 신림선 도시철도 민간투자사업 전면책임감리용역(2공구) -

물가변동 등으로 인한 계약금액 조정 검토 (총괄 10회, 5차 1회)

신림선 도시철도 전면책임감리용역(2공구)의 물가변동 및 감리원 투입계획 변경(안전관리 전담감리원 교체)에 따른 계약금액 조정 요청에 대한 검토 보고임

※ (주)유신 감리 21-53호(2021.01.19.) 관련

□ 용역 개요

○ 용 역 명 : 신림선 경전철 민간투자사업 전면책임감리용역(2공구)

○ 계 약 자 : ㈜유신 외 2개사

○ 계약현황

(단위:천원, 부가세포함)
구분	계약일	용역 기간	계약금액	비 고
총괄	***********	*************************	*********
1차	***********	*************************	*******	**
2차	***********	*************************	*******	**
3차	***********	*************************	*******	**
4차	***********	*************************	*******	**
5차	***********	*************************	*******	***
잔여	*	************************.	*******

□ 검토 내용

물가변동 반영

○ 물가 변동으로 인한 계약금액 조정

- 관련근거

□「지방자치단체 용역계약 일반조건」제5절(용역의 착수 및 보고), 제6절(과업내용의 변경, 물가변동으로 인한 계약금액의 조정)

□「지방자치단체 용역계약 특수조건」제8조(물가변동으로 인한 계약금액 조정)

□「신림선 도시철도 민간투자사업 실시협약」제57조(건설보조금)

□ 입찰공고 (서울특별시 재무공고 제2011-1115호, ´11.09.21.)

- 조정방법 : 소비자물가지수 변동률 적용

- 소비자물가지수 변동률 : 11.81%

소비자물가지수 변동률 =	(비교시점 소비자물가지수 – 기준시점 소비자물가지수)	× 100
	기준시점 소비자물가지수

=	(106.200 – 94.982)	× 100	= 11.81%
	94.982

여기서, 기준시점(´11. 07. 31.) 소비자물가지수 :   94.982

비교시점(´20. 09. 30.*) 소비자물가지수 : 106.200

* 변경대상 분기의 직전분기 말 소비자 물가지수

- 소비자물가지수 변동률(E/S) 적용 현황 ('20.09.30. 기준)

(단위 : 천원)
구 분	E/S 대상 금액 산출					변동률 (4)	조정금액 (3)×(4)=(5)	적용금액 (5)×1.1 (부가세포함)
	조정대상 금액 (1)	제외 금액			E/S적용금액 (1)-(2)=(3)
		기집행 (준공분)	손해배상 공제료	소계 (2)
총괄 (10회)	*********	*********	******	*********	*******	******	******	******
5차 (1회)	*******	*	******	******	*******	******	******	******

건설사업관리기술자 투입계획 조정

○ 감리원 투입계획 조정 현황

- 총괄 용역 : 보조감리원 배치 및 물가변동 증가분 반영 (투입계획 및 용역기간 변동 없음)

※ 안전관리 전담감리원 투입 계획 조정[도시철도사업부-9464호(´20.9.22)]

-  5차 용역 : 당초 445일('20.3.17. ~ '21.6.4.) → 변경 412일('20.3.17. ~ '21.5.2.) (감33일)

<소비자물가지수 변동률 변동 등에 따른 투입계획 변경 현황>

구 분			총괄 용역		5차 용역		비고
			당 초	변 경	당 초	변 경
계			****************	*****	*****	*****
상주감리			****************	*****	*****	*****
	토목	수석 감리사	******************** ****************	*****	********************* ****************	********************** ****************	**
		감리사	******************** ****************	*****	********************* ****************	********************** ****************	**
		감리사	******************** ***************	*****	********************* ****************	********************** ****************	**
		감리 사보	******************** ****************	******************* **************** ****************	******************** ***************	********************** ****************	** ******
		감리 사보	******************** ****************	******************* *************** ****************	********************* ****************	********************** ***************	** ******
	건축	감리 사보	******************* ****************	*****	********************* ****************	********************** ****************	**
기술지원감리			***************	*****	**************	**************

○ 감리원 투입계획 조정에 따른 계약금액 조정

(단위 : 천원, 부가세 포함)
구 분	계약금액	조정금액			변경계약 금액
		소 계	물가변동	투입계획 조정
총괄분 (10회)	*********	*********	*********	*	*********
5차 (1회)	*******	*	*********	*********	*******

□ 조치 계획

○ 효율적인 과업 수행을 위해 상기 검토내용과 같이 감리원 투입계획 변경에 따라 총괄 및 제5차 용역 계약을 변경하고자 함

- 용역 변경 내용

(단위 : 천원)

구분	당 초		변 경		비 고
	계약기간	계약금액	계약기간	계약금액
** *****	********** *********	*********	********** *********	*********	******************* ************************ ********* ****************************************
** ****	********** *********	*******	********** *********	*******	****************** ******************* ********* ******************************************* ***********************

붙  임   1. 감리단 공문(관련 서류) 1부

2. 변경 설계내역서 각 1부

3. 보조감리원 변경 승인 검토 보고서 1부.  끝.