문서번호	급수운영과-1354
결재일자	2021. 1. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장		서부수도사업소장
김재엽	김찬모	김원수		01/21 김정일
협 조
	시설관리과장		이준호
	시설운영팀장		김용만
	급수관리팀장		박상열

2021년 장기사용 배급수관 정비 추진계획

2021. 1.

서부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

2021년 장기사용 배급수관 정비 추진계획

관내부의 도장재 탈락 등으로 수질사고 우려가 높은 장기사용 배급수관을 정비하여 최적의 관망환경을 조성, 깨끗하고 안전한 수돗물을 공급하고자 추진계획을 보고 드림.

Ⅰ		현 황

□ 추진근거

○ 2021년 장기사용 배급수관 정비계획(누수방지과-9506호, ’20. 12. 29.)

□ 추진방향

○ 수질 및 누수사고 개연성이 높은 ’84~’85년에 매설 닥타일주철관

○ 2세대 상수도관 중 급격한 노후화로 도장재 탈락된 취약 상수도관

Ⅱ		2021년 정비계획

□ 정비목표 : 4.7km

□ 사 업 비 : 4,700백만원

□ 정비 우선순위

○ 녹물 및 이물질 출수 등 민원발생 구간

○ 누수 다발구간

○ 서울형 도시재생활성화 지역

□ 배급수관 정비계획(총괄)

(단위 : m, 백만원)

구분 구별	계		단위사업(90%이상)			연간단가(10%이내)
	연장	사업비	건수	연장	사업비	연장	사업비
계	4,700	4,700	3	4,250	4,250	450	450
서대문구	1,570	1,570	1	1,420	1,420	150	150
마포구	1,556	1,556	1	1,366	1,366	190	190
은평구	1,574	1,574	1	1,464	1,464	110	110

□ 단위사업 발주계획

공 사 명	공사개요		사업비 (백만원)	담당자 (부서)
	구경(㎜)	연장(m)
계	80~300	4,250	4,250
************** **************	80~150	1,420	1,420	조재민 (급수운영과)
************** **************	80~200	1,366	1,366	정진우 (급수운영과)
************** **************	80~300	1,464	1,464	장원석 (시설관리과)

□ 추진일정

도면심사	⇒	일위대가	⇒	계약심사	⇒	공사발주	⇒	계약 및 착공	⇒	준 공
2021. 1.		2021. 2.		2021. 2.		2021. 2.		2021. 3~4.		2021. 11.

□ 기타사항

○ 감독업무 위탁기관인 서울시설공단에 공사감독자(3명) 지정 요청

- 공사발주 전 수도사업소 담당자와 합동 현장조사 및 착공 후 공사감독

(품질관리, 안전관리, 공정관리 등) 업무 수행

○ 이동식 근로자 편의시설(캠핑카) 설계 반영 및 공사현장 사용여부 확인

Ⅲ		행 정 사 항

○ 추진실적 보고 : 매월 7일 이내(본부 누수방지과)

○ 도로굴착사업계획조정 및 굴착허가 신청 : 2021. 1. ~ 2월

붙임  1. 장기사용 배급수관 정비실적 월보(양식) 1부.

2. 위치도 각 1부.  끝.