문서번호	조경과-470
결재일자	2021. 1. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관	주무관		조경과장		관리부장		서울대공원장
성종화	김흔진		김강환		오성문		01/25 이수연
협 조

테마가든 재조성사업(2차) 추진계획

2021. 1

조경과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

테마가든 재조성사업(2차) 추진계획

테마가든 재조성 계획에 따라 노후시설개선 및 장미 품종개량을 통한 이용객의 요구를 반영하여 이용만족도를 높이고자 함

1		추진경위

○ 테마가든 재조성사업 추진계획(조경과-567, 2018.1.31)

○ 서울대공원 테마가든 재조성사업 기본계획용역 시행(조경과-789, 2018.2.9)

○ 서울대공원 테마가든 재조성사업 실행계획(조경과-7686, 2019.11.25)

○ 서울대공원 테마가든 재조성 공사 시행(1차)(조경과-1613, 2020.2.26)

2		현황 및 문제점

□ 테마가든 현황

○ 규    모 : 84,147㎡ (장미원 등 54,075㎡, 어린이동물원 28,072㎡)

○ 개원년도 : 2000. 9. 1

○ 주요시설

- 장미원, 주제정원(모란·작약원, 휴(休)정원, 고향정원)

- 어린이동물원(양 먹이주기, 동물교실 등), 기번아일랜드

○ 식재현황 : 150종 54,100주(장미 : 90종 45,000주, 수목류 : 60종 9,100주)

테마가든 배치도	장미원 전경

□ 테마가든 재조성 사업(1차)

○ 장미 1단지 품종(22종 7,220주) 개량, 회양목 엣지 식재 등

○ 수목식재 및 이식, 인조화강석 블록 등 포장

○ 조경시설 및 수경시설 정비 등

테마가든 입구 전경 공사 전	테마가든 입구 전경 공사 후

테마가든 분주대 주변 공사 전	테마가든 분주대 주변 공사 후

□ 문제점

○ 개장 20년이 지나 시설노후화(도로 등)로 인한 안전사고 우려

○ 장미의 노쇠로 고유색 퇴화, 향기저하 등으로 품종 개량 필요

○ 장기간 집약재에 따른 특정미량원소 부족 등 토양개량 필요(지력향상)

○ 집중호우시 일부 저지대 침수에 따른 배수시설 보완

3		추진계획

□ 추진방향

○ 장미원 고유의 정체성 확보

- 장미원 스토리텔링 콘텐츠 개발 및 품종 개량

- 장미원 식재지 토양개량 등 생육환경 개선

○ 테마가든 노후시설 개선

- 공간별 특성에 적합한 포장정비 및 기반시설(배수시설) 정비

- 회양목 식재 등 엣지 조성을 통한 장미원 화단 경계부 재정비

○ 고향정원 개선

- 사과나무 등 일부 병해충피해목 및 수형불량목 제거 후 연차적으로 예산 확보하여 초화류원 및 잔디정원 등 조성 정비

□ 세부 추진계획

○ 실시설계 용역 시행

- 추진방법 : 수의계약(지방계약법 시행령 제25조, 제13조)

- 용 역 비 : ********

- 대    상 : 조경기술사사무소 또는 조경분야엔지니어링 업체

○ 공사 시행

- 추진방법 : 일반경쟁입찰(지방계약법 시행령 제13조)

- 용 역 비 : ********************

- 대    상 : 조경분야엔지니어링 업체

○ 추진일정

- 2021년 1월              : 계획서 수립

- 2021년 2월 ~ 3월       : 실시설계용역

- 2021년 3월 ~ 5월       : 2차공사 시행 완료

4		향후계획

○ 2022년 이후 테마가든 기본계획용역 및 실행계획에 따라 예산 확보하여 사업 추진

○ 테마가든 정문앞 광장, 장미원4단지 정비, 수변산책로(테크) 정비 및 고향정원 재조성

○ 장미 품종 및 고유특성 보존을 위한 산․학연구 사업 연계 추진.  끝.