문서번호	현장민원과-1258
결재일자	2021. 1. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
★주무관		현장민원과장		강서수도사업소장
서주태		代최상희		01/26 정진일
협 조
	요금과장				이영미
	급수운영과장				성기선
	시설관리과장				유명은

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”

2021년 수도계량기 교체 계획

2021. 1.

강서수도사업소

(현장민원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□	서울시설공단
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2021년 수도계량기 교체 계획

법정 유효기간 도래 수도계량기의 적기 교체와 고장계량기의 신속한 교체로 공정한 요금부과에 만전을 기하고자 함.

○ ‘21년 교체 예정량 : 41,965개 (만기 36,643개, 고장 2,750개, 원격 72, 폐전 2,500개)

Ⅰ		현 황

추진근거

○ 2021년 수도계량기 교체 계획(계측관리과-492, ‘21.1.15.)

○ 수도 계량기 만기 교체 : 계량에 관한 법률 제23조 및 동법 시행령 제21조

- 50㎜ 이하 소형 수도계량기 검정유효기간(8년) 만기에 따른 교체

교체업무 구분

○ 근거 : 수도계량기 점검 및 교체사무 대행 협약서 제2조

수도사업소	서울시설공단
○ 소형계량기(50㎜ 이하) 고장 교체 ○ 만기·동파 교체대상·결과 확인 및 관리 ○ 교체불가 계량기 원인파악 및 조치 ○ 소형계량기 교체업무 지도 및 감독	○ 소형계량기(50㎜ 이하) - 만기·동파 교체, 폐전철거 ○ 대형계량기(50㎜ 초과) - 만기·동파·고장 교체, 폐전철거

- 만기․동파․폐전 등 수도계량기 교체에 관한 업무

구 분	교체인원	담 당 업 무
사업소 교체직원	2명	계량기 수불, 고장계량기 교체, 교체장애수전 정비, 민원처리 등
시설공단 교체원	9명	만기교체, 폐전(재건축)철거, 동파교체

교체인력 현황

급수수전 : 357,531전(서울시 전체수전의 16%)

○ 업종별

(2020.12.31.)

구 분	계	가정용	일반용	공공용	욕탕용	임시급수	소화전	급수탑
계	357,531	319,443	29,033	2,123	108	162	6,654	8
양 천 구	113,753	103,367	7,580	570	35	22	2,178	1
강 서 구	162,307	145,319	13,382	819	36	90	2,659	2
구 로 구	81,471	70,757	8,071	734	37	50	1,817	5
비율(%)	100	89.35	8.12	0.59	0.03	0.05	1.86	0

○ 구경별

(2020.12.31.)

구 분	계	13mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm	50mm 초과
계	357,531	308,090	13,837	10,948	8,831	5,768	1,740	8,317
양 천 구	113,753	99,177	3,953	3,574	2,413	1,478	536	2,622
강 서 구	162,307	141,590	4,771	4,432	4,417	2,986	728	3,383
구 로 구	81,471	67,323	5,113	2,942	2,001	1304	476	2,312

최근 3년간 교체 및 폐전처리 실적

<목표량 대비 교체실적>                <교체실적 수량(만기, 고장, 폐전)>

(단위 : 개)

구 분	목표량	교체실적 (추진율)	만기교체	고장교체	폐전철거
2018년	43,062	44,483 (103%)	34,106	9,133	1,244
2019년	40,858	44,170 (108%)	38,722	3,888	1,560
2020년	38,497	37,289 (97%)	32,877	3,025	1,387

Ⅱ		‘21년 계량기 교체 계획

1		수도계량기 교체

교체 예정량

(단위 : 개)

합계	만기교체	고장교체	원격검침	폐전처리
41,965	36,643	2,750	72	2,500

고장계량기 교체

○ 교체인력 : 수도사업소 교체직원 2명

○ 예상물량 : 2,822개 (고장 2,750, 원격검침 72)

○ 작업범위 : 소형(50mm이하) 고장계량기 교체

※ 급수대책기간(‘20.11.15 ~ ‘21. 3.15) 동파 계량기는 서울시설공단에서 교체

○ 처리기한 : 5일 이내 원칙 (단축처리기간 : 3일)

○ 업무처리절차

① 계량기 검침 (계량기상태)	➠	② 교체의뢰 (고장계량기)	➠	③ 작업지시 (계량기교체)	➠	④ 처리결과 (전산입력·통보)
(서울시설공단)		(요금과)		(현장민원과)		(현장민원과)

검정유효기간 도래(만기) 계량기 등 교체

○ 교체인력 : 서울시설공단 9명 (반장 1, 교체원 8)

○ 작업범위

- 소형(50mm 이하) 계량기 만기교체, 폐전철거, 겨울철 동파교체

※ 대형 재건축·재개발 단지에서 이주 지연, 관 노후 등으로 개별적인 철거가

곤란한 경우에는 내부방침 수립 후 일괄철거 업무추진

- 폐전철거 후 누수발생 방지를 위하여 플러그 설치 철저

○ 교체계획

- ’21년 교체 목표량 : 39,143개 (만기 36,643, 폐전 2,500)

- 월별 목표량

(단위 : 개)

목표량	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
39,143	4,000	4,100	4,100	4,100	3,500	3,500	4,100	4,100	4,100	3,543

업무 처리 절차

○ 만기

① 만기작업지시 (교체대상 생성)	➠	② 만기물량배분 (교체원지정)	➠	③ 만기교체작업 (현장교체)	➠	④ 작업결과처리 (PDA입력·통보)
(현장민원과)		(서울시설공단)		(서울시설공단)		(서울시설공단)

⑤ 교체결과확인	➠	⑥ 교체장애(통보)	➠	⑦ 장애정비 (서울시귀책)	➠	⑧ 만기교체 (현장교체)
(현장민원과)		(현장민원과)		(급수·시설관리과)		(서울시설공단)

○ 폐전

① 폐전신청	➠	② 최종지침 확인 (현장 및 유선)	➠	③ 체납 등 사용료 고지발급	➠	④ 철거요청
(민원인)		(요금과)		(요금과)		(요금과)

⑤ 철거 지시	➠	⑥ 철거 및 반납	➠	⑦ 폐전처리 (아리수 인포 입력
(현장민원과)		(서울시설공단)		(현장민원과)

- 폐전 처리기한 : 5일 이내 원칙

‣ 계측관리과-9606(2019.10.23.) 수도계량기 종합관리개선계획

2		교체장애수전 정비

추진개요

○ 정비목표 : 120개 예상 (서울시 귀책분)

○ 정비기간 : 2021. 3. 1 ~ 12. 31

○ 소요예산 : 56,481천원 (배급수비, 교체장애수전 정비)

※ 현장민원과 교체장애수전 정비요청에 의해 공사부서에서 집행

○ 정비방법

- 서울시 귀책 : 교체원 직접교체 또는 공사부서 정비 의뢰

▸ 관노후, 심도장애, 밸브고장, 유니온장애

- 수요가 귀책 : 수용가 협조를 통해 장애해소 후 교체

▸ 주차장애, 옥내설치, 공가세대는 야간, 공휴일 교체

3		역류방지밸브 설치

추진개요

○ 설치 예정량 : 9,400개

- 본부 급수설비과 목표 설정

▸ 서울시설공단 교체원 인원수에 따른 설치 목표량 배분

▸ 교체원 인원수가 조정 될 경우 목표량 변경 될 수 있음.

○ 기    간 : ’21. 3. 1. ~ 12. 31. (만기계량기 교체기간과 동일)

○ 설치인원 : 서울시설공단 9명 (반장 1, 교체원 8)

○ 추진내용

- 설치 불가 건물(감압밸브 설치 아파트 및 소출수 지역)을 제외한

만기교체 대상에 모두 설치

Ⅲ		수도계량기 수불관리 계획

공통사항

○ 수불은 선입선출 원칙하에 관리 (담당자 지정 운영)

○ 수도계량기 및 부속자재 운반·보관·설치 시 훼손이나 변형이 발생

하지 않도록 주의, 분실이나 훼손 시 변상조치

수도계량기 및 부속자재 수불관리

○ 만기, 고장 등에 소요되는 수도계량기 및 부속자재 수령․출고

※ 보관장소 협소로 약 1개월 소요량 수령·비축

○ 수도계량기 및 부속자재 입· 출고 즉시 자재관리시스템 입력·관리

Ⅳ		행정사항

현장민원과
○ 소형계량기 교체(고장·검정 계량기) 및 서울시설공단 교체업무

지도·감독 (만기·동파 계량기 교체 및 폐전철거 등)

○ 교체장애수전 귀책 사유별 조치 의뢰

○ 소형계량기 및 부속자재 교체 후 작업내역 전산입력 현행화

공사부서 (급수운영과, 시설관리과)

○ 서울시 귀책 교체장애수전 정비 협조

○ 만기계량기 교체, 역류방지밸브 설치 관련 긴급누수 발생시 협조.  끝.