문서번호	도로보수과-636
결재일자	2021. 1. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	성동도로사업소장
하승환		이수범	01/26 장상규
협조
	주무관		김영봉

’21년 노후포장도로 정비공사 추진계획

2021.   1.    .

성동도로사업소

도로보수과

’21년 노후포장도로 정비 추진계획

노후 ․ 파손이 심한 포장불량 구간에 대한 노후포장도로 정비계획을실시하여 시민에게 안전하고 쾌적한 도로환경을 제공 하고자 함.

Ⅰ		추진개요

관내 시도(차도)현황

노선현황 : 55개 노선, 연장 142.41km

관리면적 : 3.91㎢

추진근거

2021년 노후포장도로 정비공사 추진계획 및 예산 재배정 알림

『도로관리과-1054호(2021.1.20)』: 노후포장도로정비공사 ********

사업개요

2021년 노후포장도로 정비 대상구간 : 19개 노선 38개 구간 2,839@

- 일 반 차 로 정비공사 : 16개 노선/34개 구간  면적 2,680@

- 버스전용차로 정비공사 :  3개 노선/ 4개 구간  면적   159@

추진방향

노후포장도로 정비공사 시공품질 향상

현장 맞춤형 포장시공 및 관리

공사조기 발주 및 선금지급 등 상반기 예산 조기집행

Ⅱ		추진계획

노후포장도로 정비공사 시공품질 향상

아스팔트 포장 공용수명 증대

- 교통량이 많은 버스전용차로 고내구성(개질SMA) 포장시공

아스팔트 생산 및 현장시공 관리감독 강화

- 건설사업관리용역사 및 사업소 합동점검 실시

현장 맞춤형 포장시공 및 관리

시험포장 및 고내구성 포장구간 등 관리대장 작성하여 이력 관리

포트홀, 소성변형, 침하가 상습적으로 발생하는 구간 정비

- 가로변 버스차로 및 일반차로 : t=12.5㎝(표층5, 기층7.5)

- 버스전용차로 중 상태가 불량한 구간 : t=20㎝(표층5, 기층15)

공사 조기발주 및 효율적인 예산집행

일상감사 등 행정절차 조속 이행으로 공사 발주 조기(긴급) 추진

포트홀 예방을 위한 선제적 공사관리 추진

- 우기전 노후포장도로 정비대상 버스전용차로 100%, 일반차로 70% 완료토록 추진

설계변경 최소화로 예산집행 효율성 향상

PC콘크리트 포장 및 차열성 포장등

PC콘크리트, 차열성포장등은 추후 예산 재배정 후 발주 검토

- 공법 선정, 기술협약, 예산 재배정(도로관리과)

Ⅲ		세부추진계획

추진경위

2020.12.04. : ’21년 노후포장도로정비 추진계획 제출(도로관리과)

2020.12.16. : ’21년 노후포장도로정비 대상구간 보고

2021.01.20. : 예산 재배정(도로관리과)

2021년 노후포장도로 추진계획

예산 집행계획 : ********

***********************

***********************

***********************

***********************

*********************

노후포장도로 정비 : 2개 구역으로 분리 시행(효율적인 공사 추진)

- 1구역(성동구, 동대문구 : 11개 노선 22개 구간 :*********

· 사업별 분리발주 : 노후포장공사(1구역), 폐기물처리용역, 노면표시등

- 2구역(중랑구, 광진구 : 6개 노선 16개 구간)  : ********

· 사업별 분리발주 : 노후포장공사(2구역), 폐기물처리용역, 노면표시, 도면작성용역등

※ 구역별 세부 공사구간은 붙임 노후포장도로정비공사 추진계획서에서 예산에 맞추어 사업 추진

유관기관 공사계획구간 홍보 및 측구 노후구간 자치구와 협의 후 병행 정비 시행

도로포장공사로 인하여 손상된 도로시설물 원상 복구 추진

Ⅳ		향후추진계획

2021. 02. 02. : 도로사업소 공통일위대가 반영 설계도서 작성

2021. 02. 03. : 전문공사 발주사업 사전검토 및 일상감사 의뢰

2021. 02. 05. : 공사발주 방침 및 계약 의뢰(재무과)

2021. 02. 25. : 계약 및 착공

2021. 12. 31. : 준공

붙임  1) 노후포장도로 정비공사 추진계획(구역별)

2) 2021년 예산 재배정 현황 1부.  끝.