문서번호	거점성장추진단-1361
결재일자	2021. 1. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
★주무관	산업거점개발팀장	산업거점활성화반장
곽승근	손철주	전결 01/26 한정훈

『G밸리 문화·복지센터 건립공사』

사고이월 예산 재배정 계획

2021. 1.

경 제 정 책 실

(산업거점활성화반)

『G밸리 문화·복지센터 건립공사』

사고이월 예산 재배정 계획

『G밸리 문화·복지센터 건립공사』관련, 명시이월 및 사고이월 예산을 재배정하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

□ 관련근거

○ 예산 재배정 요청 (도시기반시설본부 건축부-493(2021.01.13.))

○ 예산 재배정 요청 (도시기반시설본부 설비부-994(2021.01.22.))

□ 사업개요

○ 위    치 : 금천구 가산동 345-58번지 외 2필지

○ 사업기간 : ’14. 11. ~ ’21. 2.

○ 규    모 : 지하2층/지상10층, 연면적 6,017㎡

○ 공 정 율 : 44%(‘21.1기준), 8층 골조공사 진행 중

○ 총사업비 : 23,088백만원(국비: 2,045 시비: 21,043)

□ 추진경과

○ G밸리 기본 및 실시설계                      : ’16.10.~’17.9.

○ G밸리 근로자 문화·복지센터 건립 2차 변경계획 수립 : ’17.7.

○ 공사착공                                      : ’18.3.

○ 공사중단(시공사 자금난악화)                   : ’19.4.~12.

○ 시공사 주계약자 재선정 및 공사재개            : ’20.1.

○ 하도급사 유치권 행사로 공사 중단                   : ’20.8.~10.

○ 유치권점유 방해금지 가처분 기각                    : ’20.10.28.

- 채권자 : 매봉건설, 채무 : 서울시, 예강건설산업

○ 공사 재개                                          : ’20.10.30.~

□ 예산 재배정 계획

○ 예산현황(예산현액 기준)

(단위:천원)

구 분	예산현액	본예산	이 월 예 산
			합 계	사고이월	명시이월
	11,228,181	1,989,000	9,239,181	3,755,353	5,483,828
시설비	10,373,353	1,460,000	8,913,353	3,755,353	5,158,000
감리비	559,828	326,000	233,828	0	233,828
민간 위탁금	295,000	203,000	92,000	0	92,000

○ 이월예산 재배정 계획

- 예산과목 : 경제정책실 거점성장추진단, 거점성장 기반 마련, 산업클러스터 조성 및 활성화, G밸리 문화복지센터 조성, 시설비/감리비

(단위:원)

구분	재배정 부서	이월예산			금회 재배정액	배정잔액
		사고이월	명시이월	합 계
합 계		3,755,352,844	5,391,828,000	9,147,180,844	9,147,180,844	0
시설비	소 계	3,755,352,844	5,158,000,000	8,913,352,844	8,913,352,844	0
	도시기반시설본부 건축부	2,619,354,344	1,914,250,000	4,533,604,344	4,533,604,344	0
	도시기반시설본부 설비부	1,135,998,500	3,243,750,000	4,379,748,500	4,379,748,500	0
감리비	도시기반시설본부 건축부	0	233,828,000	233,828,000	233,828,000	0

※ 민간위탁금 92백만원(명시이월) 제외

붙임 : 예산 재배정 요청 공문(도시기반시설본부) 각 1부.  끝.