문서번호	물순환정책과-1826
결재일자	2021. 1. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	물순환시설팀장	물순환정책과장		물순환안전국장
최용석	이웅희	김재겸		01/26 최진석
협 조

CSOs 저류조(2개소) 설치

기본계획 수립용역 발주계획

2021. 1.

물순환안전국

(물순환정책과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	■	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	■	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	■	□
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

CSOs 저류조 (2개소) 설치

기본계획 수립 용역 발주계획

강우시 비점오염물질인 월류수(CSOs)의 하천유입 최소화 및 적정 처리하여 물고기 폐사, 생태계 교란 방지 등 하천구역 환경을 보호하고 수질오염총량제 목표수질 달성에 기여하고자 함.

Ⅰ		용역개요

○ 용역명 : CSOs 저류조(2개소) 설치 기본계획 수립 용역

○ 위  치 : 뚝섬, 대치 유수지 내

○ 용역비 : 348,200천원

○ 기  간 : ’21. 2. ~ ’21.12.

○ 과업내용

- CSOs 저류조 설치 계획 수립을 위한 기초자료 수집 및 현장조사

- 뚝섬, 대치유수지 CSOs 저류조 설치계획 수립

□사업 타당성 및 경제성 분석‧결과 제시

□대상지역의 처리유량, 오염부하량 조사

□소요사업비 및 사업기간 산정, 연차별 투자계획 수립 등

- 기설치 시설 운영현황 분석을 통해 물재생센터 연계 운영계획 수립

- 유수지내 CSOs 저류조 설치 계획외 CSOs 저류‧처리 방안 제시 등

Ⅱ		주요 추진현황

○ ’20.10.14. : 기본계획 용역 시행계획 방침 수립(물순환안전국)

○ ’20.10.19. : 기술용역타당성심사 결과 통보(조건부 적정)

○ ’20.12.18. : 건설기술심의(용역발주심의) 요청(과업내용 검토)

○ ’20.12.27. : 사업수행능력 세부평가지준(PQ) 협의 완료(기심)

○ ’21. 1.15. : 건설기술심의(용역발주심의) 완료(조건부 채택)

Ⅲ		발주절차

□ 발주개요

○ 입찰방법 : 일반경쟁입찰

○ 낙찰자 선정방식 : 사업수행능력평가(PQ) 후 가격 입찰

○ 입찰자격

-「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」시행령 제13조에 의한 자격을 갖추고, 아래의 요건을 충족하는 업체로서 기술의 상호보완을 위하여 2개 업체 이상 공동도급(공동이행방식 또는 분담이행방식, 혼합이행방식)으로 입찰에 참여할 수 있음

□「엔지니어링산업진흥법」제21조 및 같은법 시행령 제3조의 규정에 의거 입찰 공고일 현재 건설부문(상하수도, 수자원개발, 토질·지질, 구조, 도시계획)과 기계부문(일반산업기계), 전기부문(전기설비), 설비부문(설비), 환경부문(수질관리) 분야에 엔지니어링 업체 등록을 필하고 해당 분야별 기술자를 보유한 업체 또는 「기술사법」제6조에 의거 건설부문(상하수도, 수자원개발, 토질·지질, 구조, 도시계획)과 기계부문(일반산업기계), 전기부문(발송배전), 설비부문(설비), 환경부문(수질관리) 분야의 기술사 사무소를 개설 등록한 업체

□ 입찰참가신청서 평가

○ 수행실적 평가팀(위원회) 구성 및 평가

- 수행실적 평가 팀 : 절대평가 항목 평가

□구    성 : 발주부서 직원 3인 이상 5인 이내

□평가방법 : 수행실적 평가기준(평가 항목별 배점)에 의거 평가

- 수행실적 평가 위원회 : 상대평가 항목 평가(기술능력, 업무관리능력)

□구    성 : 내부위원 3인 이상 5인 이내

□위 원 장 : 발주부서장 또는 발주부서장이 평가위원 중에서 지명

□내부위원 : 발주부서가 소속된 실·국의 공무원을 제외한 타·실국 소속의 5급이상 공무원

※ 특정분야의 전문지식이 필요한 경우에는 발주기관의 기술자문위원회 또는 서울시 건설기술심의위원회 위원 등 외부위원을 평가위원으로 선임할 수 있음

□평가결과 공개 : 기술능력·업무관리능력 평가 결과(평가위원별 평가사유서 및 평가점수)를 시 홈페이지 또는 발주기관별 홈페이지에 공개

○ 입찰참가 적격자 결정 : 수행실적평가 결과 90점 이상 얻은 자

- 수행실적 제출업체가 15인 미만 또는 수행실적 평가점수가 90점 이상인 자가 15인 미만인 경우(득점순 15위까지) 수행실적 평가 점수가 60점 이상인 자

○ 낙찰자 결정 기준

- 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(행정안전부 예규 제 116호) 제3장 “기술용역 적격심사 세부기준” 적용

Ⅳ		향후계획

□ 추진일정

○ ’21. 1. : 발주공고 의뢰(재무과)

○ ’21. 2. ~ : 계약체결 및 과업착수

붙임 : 1. 과업내용서 1부.

2. 사업수행능력 세부평가기준 1부.

3. 설계내역서 1부. 끝.