문서번호	재생정책과-972
결재일자	2021. 1. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		재생소통팀장	재생정책과장
이회덕		신덕순	01/26 김규룡
협조
	계약1팀장		원종순

「우당 이회영 기념관 전시 기획·조성 용역」

준공기한 연장 계획

2021. 1.

도시재생실

(재생정책과)

「우당 이회영 기념관 전시 기획·조성 용역」

준공기한 연장 계획

우당 이회영 기념관 전시인테리어 공사 지연 등으로 전시·기획 조성 과업기간 확보가 필요하여 준공 기한을 연장하고자 함

Ⅰ		용 역 개 요

○ 계약건명 : 우당 이회영 기념관 전시 기획·조성 용역

○ 계약기간 : 2020.08.12.  ~ 2020.11.30.

○ 계약업체 : *********************

○ 계약금액 : 금52,212천원(금오천이백이십일만이천원)

○ 과업내용

- 전시관 기획 및 전시물(콘텐츠, 모형 등) 기획/조성 방안 마련

- 전시관 공간 구성계획 / 전시 디자인, 전시물 설치 감리

- 기념관 전시 콘텐츠 자문·감수회의

Ⅱ		추 진 경 위

○ 2019. 12월     우당기념관 조성방안 보고

○ 2020. 1~4월   기념관 조성 공간 확보 및 임대협의

- 남산 예장자락 신축건물 활용

○ 2020. 5월       우당 이회영 기념관 조성사업 추진계획 수립

○ 2020. 8월       전시·기획 용역 실시

○ 2020. 11월      1차 계약기간 연장

- 전시인테리어 공사 지연등으로 준공기한 1차 연장(2020.11.30~’21.1.29.)

○ 2021. 1월       기념관 전시 콘텐츠 자문·감수회의

Ⅲ		변 경 계 획

*******************

- 연장기한 : ’21. 01. 29. → ’21. 02. 28.

※ 당    초 : ’20. 08. 12. ~ ’20. 11. 30.

○ *장사유

- 기간 연장 : 기념관 인테리어 공사가 지연되어(’21.2.10.완공예정) 전시 디자인 및 유물 설치기간 확보

- 코로나19로 인한 과업내용 일부 변경 : 기념관 개장식 등 프로그램 기획·진행 ⇒ 기념관 전시 콘텐츠 자문·감수회의

Ⅲ		향 후 계 획

○ 2020. 12.~ ’21. 1.      전시 디자인 및 전시물 설치

○ 2021.  2. 28.            최종결과 보고서 제출(용역 준공)

○ 2021.  5월                전시관 개관

붙임  합의각서 1부.  끝.