문서번호	행정지원과-1898
결재일자	2021. 1. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관	행정관리팀장	행정지원과장	서부수도사업소장
이래운	강정환	박달경	01/28 김정일
협 조
	주무관		장은숙
	주무관		구자람

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”

“직원 복지 향상을 위한”

청사 별관 옥상 휴게공간 조성 계획

2021. 1.

서부수도사업소

(행정지원과)

“직원 복지 향상을 위한”

청사 별관 옥상 휴게공간 조성 계획

직원의 휴식 및 재충전을 위한 휴게공간을 청사 별관 옥상 유휴공간에 조성하고자 함.

Ⅰ		추진배경

□ 직원 휴식을 위한 옥외 휴게공간 설치 요구(노조지부)

□ 옥상 출입 시 사고 예방을 위한 안전난간 설치 필요

□ 노후로 인한 별관 옥상 방수층 들뜸 및 균열 발생으로 정비 필요

Ⅱ		사업개요

□ 조성위치: 별관 옥상

○ 면적: 약 134㎡(약 41평)

○ 도면 및 현황사진

별관 옥상 평면도	현황사진(별관 옥상)

□ 사업예산: ********

□ 조성내역

- 옥외용 휴게시설(퍼걸러) 설치: 별관 옥상

휴게시설의 일종으로 햇볕이나 비를 가릴 수 있으며 앉을 자리가 있는 옥외 시설물

- 추락 등 사고예방을 위한 안전난간 설치: 본관 및 별관 옥상

- 방수공사 1식: 별관 옥상(134㎡), 외벽(232㎡)

- 설치도(예시)

Ⅲ		설치계획

□ 구매(수리) 물품 및 수량

○ **************************************

○ *********************************************************

○ ************************

※ **************************

□ 구매(수리) 방법

○ ***********************************

○ **********

- ****************************

□ 소요예산: **********

○ 산출근거

- ***************************

- ****************

□ 예산과목

○ 퍼걸러 및 안전난간: 자본적지출, 건물, 서비스 장비 확충 및 환경개선,시설비 및 부대비, 시설비

○ 방수공사: 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 수선유지교체비, 수선유지비

Ⅳ		추진일정

□ 구매(수리) 발주 : ’21. 2. 10.까지

□ 안전난간 설치   : ’21. 3. 12.까지

□ 옥상 방수공사   : ’21. 4. 30.까지

□ 휴게시설 설치   : ’21. 4. 30.까지

Ⅴ		행정사항

□ 건물의 안전성 확보 및 직원 복지향상을 위해 신속 추진.

□ 휴게시설 설치 후 물품관리시스템 전산 등록.  끝.