“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	[암사2정수 탈수설비 개량 정보통신공사]공사준공을 위한 정산보고

우리 본부에서 시행하고 있는 『암사2정수 탈수설비 개량 정보통신공사』건에 대한 제경비(보험료 등) 정산사유가 발생하여 아래와 같이 감액 정산 처리하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 암사2정수 탈수설비 개량 정보통신공사

나. 계 약 자 : ㈜헤로스테크

다. 변경내용

구분	당초	변경	증·감
계약기간	’20.11.26.∼’21.1.29.	(변경없음)	-
계약금액	61,172,790원	59,935,300원	(감)1,237,490원

라. 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, (정수센터 시설정비), 시설비및부대비, 시설비

마. 정산사유 : 제경비 내역 중 납입확인서 미제출한 부분(국민건강보험료, 국민연금보혐료, 노인장기요양보험, 산업안전보건관리비 등)에 대하여 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제1장 제8절(보험료 사후정산)에 의거 감액 정산 처리

붙임  1. 변경내역서 1부

2. 정산합의서 1부.  끝.

주무관	김인준		예산팀장	홍경숙		기전설비과장	최강욱		생산부장	01/28 서대훈
협조자	주무관	박상진		주무관	채창옥
시행	기전설비과-971	(		)	접수		(		)
우	04770	서울시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1334	/전송	02-3146-1319	/	duulnet@seoul.go.kr	/	부분공개(3)