의원 요구 자료 제출

시 행	광화문광장추진단-883
결재일자	2021. 1. 28.
공개여부	부분공개(5)
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조
수신자	기획담당관,재생정책과장

주무관		광장계획팀장	광화문광장사업반장	광화문광장추진단장	도시재생실장	결재
김혜경		강성필	임창수	정상택	01/28 류훈
협 조

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 199번, 최연숙 의원, 보건복지위원회)

따로붙임 : 국회의원 요구자료 1부.  끝.

최연숙 의원(보건복지위원회, 국민의당)

□ 요구번호 199

3. 도시계획

2) 광화문광장 재구조화관련 현재안 선정 관련자료/ 관련 예산자료 일체 /

공사재개 의사결정 과정 자료 일체

□ 의원님이 요구하신 ‘광화문광장 재조성사업’관련 자료를 아래와 같이 제출합니다.

□ 현재안 선정 관련현황

○ ’16.9.~’17.5.	광화문포럼 구성 및 운영 (광장 조성방향과 원칙 마련)

○ ’18.4.10.	광화문광장 재구조화 기본계획 발표(문화재청, 서울시)

○ ’18.7.	광화문시민위원회 발족(서울시)

○ ’18.8.6.	녹색교통진흥지역 특별종합대책 수립 (국토부 고시 2018-483호)

○ ’19.1.21.	새로운 광화문광장조성 설계공모 당선작 발표(서울시)

○ ’19.3.21.	기본 및 실시설계 용역 계약 및 착수(서울시)

○ ’19.9.19.	시민소통 강화계획 발표

○ ’19.9~12.	시민소통 추진(61회, 12,115명 참여)

[시민공개토론 4회, 찾아가는 전문가 토론 3회, 시민대토론 2회, 현장소통 3회, 온라인 소통 등]

< 시민소통 결과 >

◈ 現 광장의 문제점 공동인식하고, 사업추진 필요성 재확인

- 일반 서울시민 설문(1,000명 / ’19.12.)	: 변화·개선 필요 73.5% 공감

◈ 시민의 일상성 확보와 문화적 활용을 위해 공원 같은 광장 조성

◈ 집회·시위, 행사로 인한 교통·소음대책 마련

◈ 장기적 전면 보행광장 조성하되, 단계적 추진

- 단계적 서측광장(세종문화회관쪽) 64.9%로 가장 선호 (’19.12. 시민토론단 268명 설문)

○ ’20.2.13.	시민소통 결과 대외발표 - ‘시민 뜻 담아 사업 추진’

< 단기사업 추진방향 >

◈ 시민의 뜻을 반영하여 구체적인 계획안 마련하고, 협의 등을 거쳐 설계안 확정

◈ (세종대로) : 시민의 뜻 반영하여 전문가·관계기관 협의를 거쳐 구체적 계획안 마련

◈ (사 직 로) : 교통영향을 최소화하기 위해 현재노선 유지하되, 월대복원은 문화재청  발굴조사와 관련논의 등을 통해 복원시기, 방법 등 결정

○ ’20.2~9.	지역주민 소통(42회), 관계기관(행안부, 문화재청 등), 시민단체, 지역구 국회의원실 협의

○ ’20.2~6.	기본 및 실시설계(안) 마련

○ ’20.6~9.	도로공사에 대한 사전행정절차 완료 (교통영향평가 등 20개 절차)

○ ’20.9.28.	사업 시행계획(안) 대외발표

< 주요내용 >

◈ 사직·율곡로 현재 기능 유지, 서측광장 조성,동측도로 양방향 확장(7~9차선) 조정

◈ 주변 상권 피해 등 우려, 지하공간 조성계획 취소

◈ 광장 주변부 포함한 광화문 일대 종합발전계획 수립 등

※ 개념도

구분	당초 계획(’18.4월 ~ ’19.8월)	변경 계획 (’19.9월 ~ )
특징	사직로 “U”자형 도로이설	사직로 현재 기능 유지
도면

□ 예산자료 : 총사업비(연차별 투자계획)

(단위: 천원)

계	2020년 이전	2021년	2022년 이후	비 고
79,100,000	31,680,000	38,892,000	8,528,000

□ 공사재개 의사결정 과정 자료 일체

※ ’16.9~’20.9월 진행사항은  위 ‘□ 현재안 선정 관련현황’의 내용과 같음

○ ’20. 9월	: 도로공사 발주 (세종대로 동측도로 확장 및 정비)

○ ’20.11. 16	: 대외발표 및 공사 착수

* 세종대로 사람숲길(세종대로사거리~서울역, ’20.8~12월) 조성사업과 연계 추진

○ ’20.12. 8    : 광장공사 발주

○ ’21. 1월      : 계약완료 후 공사 준비중

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (광화문광장추진단)	담당사무관	강 성 필
	☎ 2133-7739	주 무 관	김 혜 경
	작 성 일 : 2021. 1.