문서번호	토목부-11293
결재일자	2020.6.9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
최승룡		최진우	06/09 김용제
협조

[세종대로 도로공간 재편사업]

주계약자 공동도급 공종분리 검증위원회 개최 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020.06.

도시기반시설본부

(토  목  부)

【세종대로 도로공간 재편사업】

주계약자 공동도급 공종분리 검증위원회 개최 결과보고

『세종대로 도로공간 재편사업』발주전 공동수급체 구성을 위한 공종 내역 분리의 적정성 검토와 주계약자 계획·관리·조정업무등 분담률 산정을 위한 공종분리 검증위원회를 개최하고 결과를 보고드림.

1				사업개요

○ 위    치 : 세종대로 사거리 ~ 서울역 교차로

- 1구역(세종대로 사거리 ~ 삼성본관), 2구역(프라자호텔 ~ 서울역 교차로)

○ 사업내용 : 차로축소를 통한 도로공간 재편(L=1.55km)

- 차로폭 축소(8~12→6~9차로), 보도확장 및 자전거 도로 설치, 가로 숲 조성

○ 기    간 : 2020.06. ∼ 2020.12.

○ 사 업 비 : 18,123백만원(도급비 14,209, 관급비 3,814, 이전비 100)

- 1구역(8,847백만원), 2구역(9,276백만원)

2				회의개요

○ 일    시 : 2020.06.09.(화) 14:00~

○ 장    소 : 토목부 회의실

○ 참석자

연번	구 분	소 속	성 명	업 무	비 고
1	내부위원	도기본 토목부	최진우	회의진행 총괄	공사담당과장
2	내부위원	〃	최승룡	간 사	공사담당
3	외부위원	㈜서우TEC	이인규	공종분리 설계 내역서 반영	분야 책임기술자 (실시설계 용역사)
4	외부위원	㈜혜영건설	정종열	분담률, 공종분리 내역검토	현장대리인 (성산대교 북단 성능개선공사)
5	외부위원	㈜도화엔지니어링	신희종	분담률, 공종분리 내역검토	책임건설사업관리기술자 (성산대교 남, 북단 성능개선공사)
6	외부위원	㈜이산	박미경	조경 내역검토	조경전문 (성산대교 기술지원기술자 )

3				회의결과

□ 부계약자 5%이상 공종분리(5개)

❍ 1구역                                                (단위 : 천원)

계 (추정가격)	토 공	상하수도	조경식재	조 경 시설물	포 장	금속구조물 창 호	도 장	석 공	기 타
6,498,001	417,823	549,777	1,302,456	315,359	744,721	97,939	93,571	1,899,456	1,076,898
100.00%	6.43%	8.46%	20.04%	4.85%	11.46%	1.51%	1.44%	29.23%	16.57%

❍ 2구역                                                (단위 : 천원)

계 (추정가격)	토 공	상하수도	조경식재	조 경 시설물	포 장	금속구조물 창 호	도 장	석 공	기 타
6,418,488	438,148	355,186	1,417,827	29,833	1,222,309	90,716	238,733	1,276,929	1,348,806
100.00%	6.83%	5.53%	22.09%	0.46%	19.04%	1.41%	3.72%	19.89%	21.01%

□ 발주 적용(구역별 부계약자 : 2)

❍ 1구역                                               (단위 : 천원)

계 (추정가격)	토목 공사업(종합)	포장 공사업	조경식재 공사업
6,498,001	4,450,824	744,721	1,302,456
100.00%	68.05%	11.46%	20.04%

❍ 2구역                                                (단위 : 천원)

계 (추정가격)	토목 공사업(종합)	포장 공사업	조경식재 공사업
6,418,488	3,778,352	1,222,309	1,417,827
100.00%	58.87%	19.04%	22.09%

□ 공종분리 적용 사유

❍ 토공, 상하수도, 금속구조물‧창호, 조경시설물, 석공공사업은 상호연관 으로 부계약자 적용시 하자 책임소재가 불분명하고,

❍ 조경식재 공사업은 하자책임이 명확하여 적정 부계약자 관리를 위하여 지분율이 높은 조경식재공사업을 부계약자로 선정하고,

❍ 포장(아스콘) 공사업은 하자책임이 명확하여 부계약자로 선정

□ 주계약자 계획·관리·조정대가(1구역 6.0%, 2구역 4.0%)

❍ 부계약자의 차도포장 및 조경식재 공사는 주계약자의 업무량 증가

□ 종합결론

❍ 차량 및 시민들의 유동이 많은 현장여건과 공종간섭 및 하자문제 등을 고려하여, 주계약자 공동도급의 취지(부계약자 참여)에 맞게 공종분리 검증위원회 검토결과를 반영하여 발주코자 함

5				향후계획

○ 2020.06. : 일상감사 의뢰 및 발주

○ 2019.07. : 계약 및 착공.

붙임 1. 주계약자 공동도급 공종분리 적정성 체크리스트 1부(위원의견).

2. 주계약자 계획·관리·조정 업무대가 분담율 산정표.

3. 공종분리 내역서 1부.

4. 참석자명부 1부.    끝.