투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	설계용역 준공기한 연기 의뢰

1. 토목부-1859(2021. 1. 28.)호와 관련입니다.

2. 우리 부에서 진행 중인 「성동교 확장 및 진입램프 신설 기본 및 실시설계 용역」에 대해 아래와 같이 준공기한 연기 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

- 용 역 명 : 성동교 확장 및 진입램프 신설 기본 및 실시설계 용역(1차분)

- 용역규모 : 성동교 확장(1차로, L=186m, B=6.9m), 진입연결교량(1차로, L=60m, B=6.9m), 토공구간(L=74m, B=6.9m)

- 계약기간 : 2020.08.05. ~ 2021.08.04.(1차분, 2020.08.05. ~ 2021.01.31.)

- 계약금액 : *************************

- 설 계 사 : ㈜수성엔지니어링, ㈜진우엔지니어링코리아, 디앤에스이앤씨㈜

나. 준공기한 연기 : 120일

당초 계약기간		변경 계약기간		증/감	비 고
총괄	’20.08.05.~’21.08.04.	총괄	’20.08.05.~’21.08.04.	-
1차	’20.08.05.∼’21.01.31.	1차	’20.08.05.∼’21.05.31.	증) 120일

붙임  1. 준공기한 연기 검토보고 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰 공문 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	토목부장
주무관	김현중		토목설계과장	김동현		토목부장	01/28 김용제
협조자
시행	토목부-1890	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	2133-7410	/전송	02-3708-2599	/	khj2944@seoul.go.kr	/	부분공개(5)