문서번호	급수운영과-1966
보존기간	년
결재일자	2021. 1. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

주무관	급수운영팀장	급수운영과장	강서수도사업소장
손현정	문병희	성기선	01/29 정진일
협 조
	시설관리과장		유명은
	시설운영팀장		代김형식
	시설안전팀장		代정헌석
	급수관리팀장		代안중건

2021년 장기사용 배급수관 정비계획

2021. 1.

강서수도사업소

(급수운영과)

2021년 장기사용 배급수관 정비계획

2세대 수도관 중 관내부의 도장재 탈락 등으로 수질사고 우려가 높은 배급수관을 정비하여 최적의 관망 환경을 조성하고, 깨끗하고 안전한 수돗물을 공급하고자 ’21년도 장기사용 배급수관 및 잔여 노후 상수도관 정비사업 추진계획을 보고 드림

Ⅰ		추 진 근 거

-『2021년 장기사용 배급수관 정비계획 알림』누수방지과-9546(2020.12.29.)호

-『2021년 노후 상수도관 정비시행 철저』누수방지과-9566(2020.12.29.)호

Ⅲ		2020년 정비 현황

□ 상수도관 정비 현황(’20년 12월말 기준)                 (단위 : ㎞)

구 분	총연장	정비완료	잔여연장	비 고
장기사용 배급수관 (’84~’85 DCIP)	13.23	2.48	10.75	’20년부터 정비시작하여 연도별 정비 추진
노후 배급수관 (’84이전 CIP)	13.0	11.5	1.5	20년 사업종료후 잔여구간 장기관리

□ 21년 장기사용 배급수관 및 잔여 노후 배급수관 정비계획

○ 정비대상 상수도관 현황                                   (단위 : ㎞)

구 분	정비계획					비 고
	계	’21년	’22년	’23년	’24년
계	12.25	1.7	3.0	4.5	3.05
장기사용 배급수관 (’84~’85 DCIP)	10.75	1.7	3.0	3.0	3.05	’20년부터 정비시작하여 연도별 정비 추진
노후 배급수관 (’84이전 CIP)	1.5	-	-	1.5	-	’19년도 도로포장으로 ’23년도 공사 가능

○ 구별 상수도관 현황                                        (단위 : ㎞)

구 분	계	구별 현황			비 고
		강서구	양천구	구로구
장기사용 배급수관 (’84~’85 DCIP)	10.75	3.12	5.81	1.82
노후 배급수관 (’84이전 CIP)	1.5	-	-	1.5

Ⅲ		2021년 추진계획

□ 정비목표 : 1.7㎞

□ 정비대상 : 덕타일주철관(시멘트라이닝, 무라이닝관)

○ 수질 및 누수사고 개연성이 높은 ’84~’85년에 매설 덕타일주철관

○ 2세대 상수도관 중 급격한 노후화로 도장재 탈락된 취약 상수도관

□ 총사업비 : 1,702,000천원(시설비 1,700,000천원, 시설부대비 2,000천원)

□ 사업기간 : 2021. 3. ~ 2021. 11.

□ 단위사업 발주계획

연번	공 사 명	공사개요		사업비 (백만원)	비 고
		구경(㎜)	연장(m)
계 : 2 건		80～300	1,625	1,625
1	신월동 606번지외 5개소 장기사용 배급수관 정비공사	80~300	839	839	급수운영과
2	고척동 166번지외 4개소 장기사용 배급수관 정비공사	80~300	786	786

※ 2건(1,625m)은 단위사업으로 발주하고, 나머지 75m는 연간단가공사로 시행

□ 잔여 노후 배급수관 정비계획

연번	위 치	공사개요		향후 정비계획	비 고
		구경(㎜)	연장(m)
계 : 4 건		150 ～300	1,540
1	구로구 개봉동 189-116~146-5호간	300	401	도로굴착 통제기간(’22년) 종료후 ’23년 정비 예정
2	구로구 고척동 76-181~51-23호간	150	347
3	구로구 고척동 46-66~320번지간	200	285
4	구로구 고척동 62-135~46-19호간	250	507

※ 상기 4건은 굴착통제가 해제되는 2023년에 정비 예정이며 정비전까지 장기관리

- 정비전까지 해당구간 누수예방을 위한 주변 상시 누수탐지 시행

- 주기적인 물세척 및 주변지역 정기적인 수질검사 시행(수질팀 협조)

- 노후관 구간 취약기간(해빙기등) 동안 상수도시설물 순찰 및 점검 시행

Ⅳ		향후계획

□ 추진일정

도면심사	⇒	일위대가	⇒	계약심사	⇒	공사발주	⇒	계약및착공	⇒	준 공
’21.1.13(완료) (누수방지과)		’21. 2. (안전조사과)		’21. 2. (안전조사과)		’21. 2.~3. (본청 재무과)		’21. 3~4.		’21. 11.

○ 설계도면 심사 완료 (수도사업소 → 누수방지과)

○ 계약심사 요청(수도사업소 → 본부 안전조사과)

○ 심사결과를 반영하여 사업발주(수도사업소) → 계약(본청 재무과)

○ 예산배정 협조 요청(누수방지과 → 기획예산과)

□ 중점 추진사항

○ 철저한 현장조사 및 선제적 기술 검토 실시(본부 협의)

- 교통현황 및 지하매설물에 대해 세밀한 현장조사 실시

- 설계단계부터 공법변경등 예측 불가능한 상황에 대비한 기술검토 실시

○ 공사시행 전후 필요한 선행절차 이행 철저

- 현장여건에 부합된 설계내역 작성으로 계약심사 보완 최소화 및 심사 지연 방지

- 도로굴착 승인 및 유기관기관 협의 등 병행 추진

○ 공사 예정지역의 잠재적 민원 사전 예측 및 해결방안 마련

- 수질민원, 야간공사 예정지역에 대해 공사 초기단계부터 안내문 부착, 홈페이지

공지 등을 통한 충분한 대시민 홍보 시행

□ 행정사항

○ 추진실적 보고 : 매월 5일 이내(본부 누수방지과)

○ 도로굴착사업계획조정 심의 : 2021년 2월

○ 도로굴착승인 신청 : 2021년 2월 중순

붙임  1. 배급수관 정비공사 단위사업 계획서 1부

2. 배급수관 정비공사 단위사업카드 각 1부.   끝.