문서번호	기전설비과-1001
결재일자	2021. 1. 29.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	생산부장
김인준		최강욱	01/29 서대훈
협 조

[암사2정수 탈수설비 개량 전기공사]

설계변경 검토 보고

2021. 1.

생산부

(기전설비과)

암사2정수 탈수설비 개량 전기공사

설계변경 검토 보고

암사2정수센터 탈수설비 개량 전기공사의 신규공종 추가 등에 따른 설계변경 검토결과를 보고드림

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 암사2정수 탈수설비 개량 전기공사

○ 계약기간 : 2020. 11. 26. 〜 2021. 1. 28.

○ 계 약 자 : 주식회사화정기술(대표 민은정)

○ 계약금액 : 금85,930,000원

○ 공사내용 : 펌프 및 각종 제어반 전원 및 제어선 포설

□ 설계변경 내용

○ 변경내용

[단위 : 원]

구분	변경 전	변경 후	비고
계약금액	85,930,000	(변경없음)
계약기간	’20.11.26. ∼ ’21.1.29.	’20.11.26. ∼ ’21.2.5.	1주일 연장

○ 설계변경 사유

- 벨트탈수기 유량계 추가설치에 따른 전원·신호선 추가작업으로 공사기간 추가 연장이 필요함

□ 향후계획

○ 변경계약 체결요청.  끝.