투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	준공기한 연기 의뢰(율현공원 노후 시설개선 사업)

1. 시설과-2814(2020.9.8)호의 관련입니다.

2. 우리사업소에서 추진 중인「율현공원 노후 시설개선 사업 실시설계 용역」에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 율현공원 노후 시설개선 사업 실시설계 용역

나. 용역기간 : 2020. 08. 11 ~ 2020. 09. 09.

다. 계약금액 : 금20,720,000원

라. 도 급 자 : 조경설계사무소 씨엘디자인 대표 조형진

마. 준공기한 연기

- 당 초 : 2020. 08. 11. ~ 2020. 09. 09.

- 변 경 : 2020. 08. 11. ~ 2020. 09. 16. (7일 연장)

바. 지체상금 부과검토

- 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임  준공기한연기 검토보고서 1부.  끝.

	시설과장
주무관	최종성		공원조성팀장	하종식		시설과장	09/08 박종수
협조자
시행	시설과-2816	(		)	접수		(		)
우	07062	서울 동작구 여의대방로20길 33 동부공원녹지사업소 시설과	/
전화	02-2181-1157	/전송	02-2181-1169	/	jongsung79@seoul.go.kr	/	대시민공개