문서번호	치수과-712
결재일자	2021. 2. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관	치수과장	시설부장	한강사업본부장
이성연	최연호	박상보	02/01 신용목

한강공원 노들나루 나들목 신설사업

현안사항 및 조치계획 보고

2021. 2.

한강사업본부

(치  수  과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

한강공원 노들나루 나들목 신설사업

현안사항 및 조치계획 보고

한강공원 노들나루 나들목 신설 예정 구간에 본청 도로계획과에서 ‘노들로 구조개선 사업’으로 횡단보도 신설을 추진함에 따라 사업계획 조정 보고 드림

□ 나들목 신설개요

❍ 사업규모 : 폭 5m, 높이 3.5m, 길이 50m

❍ 사업기간 : 2020. 8. ~ 2023. 6.

❍ 총사업비 : 7,000백만원(설계비 포함)

	설계용역 추진현황
▻ 용역기간 : 2020. 8. 3. ~ 2021. 6. 30. (계약금액 : 587,700천원) ▻ 용 역 사 : ㈜동일기술공사, ㈜삼보기술단 (과업 : 노들나루 신설, 자양 증설)

□ 타부서 사업개요

❍ 주관부서 : 안전총괄실 도로계획과(시행 : 도시기반시설본부)

❍ 사업내용 : 노들로 구조 및 시설 개선(폭원 4∼8차로, 연장 8.5km)

- 자동차전용도로 → 일반도로화(보행자 및 대중교통 이용편의 도모)

❍ 사업기간 :2019. 4. ~ 2022. 12.

❍ 총공사비 : 21,400백만원(부대비 포함)

❍ 추진현황

- 진행단계 : 실시설계 완료(2020. 11)

☞ 설계결과 사업비 증액되어 재투심 이후 발주 예정(´21년 하반기)

【 사 업 위 치 도 】

사업 간섭구간

□ 현안사항 및 조치계획

횡단보도 신설(예정)

[도로계획과/도기본]

약60m

호안 보행로 신설(예정)

[도시공간개선단/한강-기반시설과]

나들목 신설(예정)

[한강-치수과]

고가차도 철거(예정)

[도로계획과/도기본]

◉ 노들나루 나들목 신설 사업 제외(과업내용 변경)

⇒ 사업 대상지 인근에 「노들로 구조 및 시설 개선」사업으로 횡단보도 신설 예정임에 따라 나들목 설치사업 제외(용역비 절감 : 약120백만원)

※ 향후 재투심 미통과 등으로 ‘노들로 구조 및 시설 개선’ 사업 보류될 경우「보행네트워크 조성사업 및 노량진북고가차도 철거공사」유관부서와 협의하여 횡단보도 신설 추진

□ 행정사항

❍ 노들나루 나들목 신설 설계용역 과업 중단 조치(잔여 설계 미실시)

☞ 자양 나들목 증설 설계용역은 정상 추진 및 사업비 확보하여 공사 시행

붙임  1. 노들나루 나들목 신설사업 추진경위 1부

2. 타부서 사업계획(노들로 구조 및 시설 개선) 관련자료 1부. 끝.