문서번호	도로시설과-1350
결재일자	2021. 2. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
전문관		시설기획팀장	도로시설과장
박진환		박주완	02/01 임대운
협조

「도로시설물 안전점검·진단 정보 갱신」용역 시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 2.

	안전총괄실 (도로시설과)

「도로시설물 안전점검·진단 정보 갱신」용역 시행계획

「지속가능한 기반시설 관리 기본법」에 따른 관리계획의 점검진단 정보 등 조사·갱신을 위한 용역 시행 계획임

Ⅰ		추진근거

○ 도로시설물 안전점검·진단 정보 갱신 추진계획(도로시설과-10898, 2020.9.25.)

Ⅱ		추진경위

○ ‘18. 8. 3.	: 평가 통합기준매뉴얼 마련(안전총괄과→각 관리부서)

○ ‘18. 8.31.         : 도로시설물 실태평가 용역 추진계획 수립

○ ‘18.10.~’20.10.	: 도로시설물 관리계획(실태평가) 용역 시행

- 도로시설물 전체 관리계획 수립

○ ‘20. 9.26.	: 도로시설물 안전점검·진단 정보갱신 추진계획

○ ‘20.12.15.	: 용역 발주심의(조건부채택)

Ⅲ		시행계획

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 도로시설물 안전점검·진단 정보 갱신 용역

○ 사업기간 : 착수일로부터 12개월

○ 사업내용 : 도로시설물 597개소

- 한강교량(21) 일반교량(237), 고가차도(83), 입체교차(41), 복개(49), 터널(36), 지하차도(116), 공동구(8), 언더패스(6)

○ 소요예산 : 501백만원

□ 주요 과업내용

○ 안전점검·진단정보 등 이력의 DB구축·개선을 위한 정보조사

- DB 구축을 위한 표준화 체계의 오류 검토 및 개선

- DB 갱신을 위한 시설물별 정보조사

○ 빅데이터 분석시스템을 활용한 중장기 계획의 분석 및 검토

- 최소유지관리 기준에 따른 관리계획 분석 및 검토

- 성능개선 기준에 따른 관리계획 분석 및 검토

○ 도로시설물 관리계획 갱신

- 예산규모에 따라 도로시설물의 종합적 관리계획 조정

○ 기타사항

□ 발주방안

○ 계약방법 : 일반경쟁입찰(협상에 의한 계약)

※ 지방계약법 시행령 제43조, 제44조

※ 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(행정안전부 예규 제134호, ‘21.1.1) 제5장

○ 입찰 참가자격(안) : 공동도급(공동+분담이행 가능) ※ 심의결과 반영

***************************************************************

**************************************************************************************

**********************************************************************

Ⅳ		추진일정

○ ‘21. 2. : 발주계획 등록 및 사전규격 공고

○ ‘21. 2. : 제안서평가위원회 구성·운영계획 수립(입찰공고후)

○ ‘21. 3. : 제안서 접수·평가, 협상적격자 통보 및 협상 실시

○ ‘21. 3. : 용역계약 및 착수

붙임  1. 추진계획 방침서 1부.

2. 과업내용서 1부.

3. 산출내역서 1부.

4. 제안요청서 1부.

5. 입찰공고문(안) 1부.  끝.