등록번호

교육아동청소년과-1881

주무관

돌봄지원팀장

교육아동청소년과장

생활복지친화국장

등록일자

2021.2.1.

이나리

서준범

정미선

전결 02/01

김종석

결재일자

2021.2.1.

공개구분

대시민공개

협조

건축시설팀장

남경연

건축과장

이두수

서울장충초「중구형 돌봄교실」조성공사 계획

생활복지친화국

교육아동청소년과

서울장충초「중구형 돌봄교실」조성공사 계획

우리구와 중부교육지원청 및 장충초 간 업무협약에 따라 구에서 직영하는 학교안 돌봄교실을 새롭게 조성하여 질 높은 돌봄서비스를 제공하고자 함

Ⅰ	추진근거

□ 아동복지법 제4조(국가와 지방자치단체의 책무)

□ 서울특별시 중구 초등학생 돌봄 지원에 관한 조례 제7조

(돌봄시설의 설치·운영)

□ 학교시설을 활용한 「중구 모든아이 돌봄교실」운영 업무협약

´2020. 11. 10.

Ⅱ	공사개요

□ 공사범위 : 장충초 별관 2층 일부(427.5㎡)

□ 공사기간 : 2021. 2. ~ 2021. 8.(설계기간 포함)

□ 공사내용

- 별관 2층에 위치한 교과1실, 영어실, 학생자치실, 다목적교실, 교과2실을 돌봄교실 5개로 조성

- 돌봄교실 앞 복도 리모델링, 중문 설치, 냉·난방설비

- 급·배수, 씽크대, 온돌마루, 조명 교체 등

- 아동 책상·의자, 사물함 및 교구장, 책장, 신발장 등 가구

〔 공사범위(별관2층) 〕

9m
9m
9m
9m

계단실			2.5m
	7.5m				7.5m
교과1실			복도	학생자치실
영어실				다목적교실
미술실				교과2실
수업자료 제작실				화장실
복도
2-4			계단실

Ⅲ	소요예산

□ 예산액 : 436,190천원

□ 산출내역

- 설계비 :  36,190천원

- 공사비 : 400,000천원

□ 예산과목 : 교육아동청소년과, 빈틈없는돌봄, 아동행복실현, 아동복지

증진, 중구모든아이돌봄사업, 시설비및부대비, 시설비

Ⅳ	계약방법

□ 설계 : 1인견적 수의계약(서울시 마을건축가 매칭, 여성기업)

□ 공사 : 경쟁입찰 계약

Ⅴ	향후계획

□ 설계용역 계약심사 : ´21. 2. 10. 한

□ 설계 발주 : ´21. 2. 17. 한 (교육아동청소년과)

□ 설계 착수 : ´21. 2. 22. 한 (설계시 건축과 협조)

□ 설계용역 준공 : ´21. 4. 21. 한 (내역검토 건축과 협조)

□ 공사 발주 및 시공사 선정 : ´21. 5. 31. 한

□ 공사 착공 : ´21. 6. 10. 한

□ 공사 준공 : ´21. 8. 9. 한.  끝.