문서번호	생산관리과-1336
결재일자	2021. 2. 2.
공개여부	부분공개(4 5)
방침번호

						시 민
★주무관	생산관리과장		생산부장
이규현	신근호		02/02 서대훈
협 조
	수처리연구과장					홍숭희
	기술진단과장					유통희
	기전설비과장					최강욱
	수질과장					代박근우
	주무관					장현성

『체계적인 정수센터 재건설 및 정비를 위한』

생산시설 공정개선 진단 T/F팀 운영계획

2021. 1

상수도사업본부

(생 산 부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	■	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	■	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

『체계적인 정수센터 재건설 및 순환정비를 위한』

생산시설 공정개선 진단 T/F팀 운영계획

▪ 노후 정수장 재건설 추진 ⇒ 생산시설 운영 전반의 문제점 진단ㆍ검토 필요

▪「생산시설 공정개선 진단 T/F팀」구성·운영 ⇒ 정수장 재건설시 개선사항 반영

Ⅰ		추진배경 및 시설현황

□  추진배경

○ 본격적인 노후정수장 재건설 추진 시점 도래 (22~)

- ‘22년부터 30년 이상 경과한 노후정수센터 재건설 용역 추진

※ 재건설(안)  암사1(‘25~29년), 구의1(‘24년~28년), 영등포1(‘29년~33년) 광암 침전지(’22~26년)

- 2040 수도정비기본계획 및 관련 용역을 통한 정수센터 순환정비 추진 중

○ 고도시설(‘07~’15년도입)및 생산시설 운영상 문제점 개선필요

- 시설확충 및 재건설과 연계하여 세부 공정별 진단 및 문제점 도출 ⇒ 개선

- (문제점) 공정별 계열화, 수리적 구배, 소독능 및 유충사태 이후 공정상 문제 등

□  생산시설 및 시설현황

○ 정수센터별 생산시설 현황

구 분		총계	강남지역							강북지역
			암사			영등포			광암	강북	뚝도	구의
			계	#1	#2	계	#1	#2				계	#1	#2
’20년 시설용량	표준	480	160	130	30	60	30	30	40	100	70	50	25	25
	고도	357 (380)	110	80	30	45	22.5	22.5	250	72 (95)	60	45	22.5	22.5
준공년도				‘86	‘98		‘92	‘10	‘79	‘98	‘17		‘84	‘15
재건설여부				X	X		X	O	’10년 성능개선	X	O		X	O
사용년수 (’21년 기준)				35년	23년		29년	31년	42년	23년	4년		37년	6년

※ ’20년 현재 강북 고도 230천㎥/일 확충공사 중

□  생산시설 노후도

생산시설 노후지수	최근년도 시설정비 · 유지보수 예산집행 추이
평균 노후화 지수 : 85.8%(사용연수/내구연수)

○ 생산시설의 노후화 지수가 평균 85.8%로  “노후단계” 진입

○ 시설 노후도 증가에 따라 정비 및 유지보수 예산의 지속적 상승

Ⅱ		정수센터 재건설 등 정비계획

□  생산시설 확충 및 재건설

❖ 추진근거 : 『2040수도정비 기본계획』ㆍ『정수장 순환정비 재건설계획』

- (방침)  “아리수정수센터 재건설 등 정비방안” (‘20.10.28) 행정2부시장

○ 사업별 연차별 추진계획(안)

대

외

구 분		사업규모 (천㎥/일)	사업비 (억원)	’20년	’21년	’22년	’23년	’24년	’25년	’26년	’27년	’28년	’29년	’30년	’31년
강북고도 증설		720 →950	163	설계	시공중
광암	재건설(침전지) 고도 확충 250→350		1,010			설계		시공
영등포 고도 확충		450 →525	380			설계		시공
강북 2정수장 신설		250	2,150	타당성조사 설계	설계 시공	시공		시공			시공
서남권 정수장 신설		450	3,164										설계	시공
구의1# 재건설		250	690					설계		시공
영등포#1 재건설		300	621											타당성조사 설계	설계 시공
암사1# 재건설		1,300 →850	1,380						설계 (타당성조사)		시공

❖ ’22년부터 시설확충 및 재건설 추진 ⇒ 시설개선 및 운영상 문제점 검토 시급

Ⅲ		공정개선 T/F팀 구성·운영 계획

▪ 표준 및 고도공정 등 생산시설 운영 전반의 분야별 문제점 체계적 검토

▪ (’22년부터 추진)  생산시설 확충 및 단계별 정수장 재건설 시 검토사항 반영

□ T/F팀 구성

○ 목 적

- 생산ㆍ운영 전반에 대한 조사 진단을 통하여 문제점 도출 및 개선대책 수립

○ (분야) ① 진단총괄 ② 수질·공정관리 ③ 설비운영 ④ 시설진단

○ (구성) 생산공정 전반의 방대한 진단범위를 고려하여 조직단위로 구성

- 민간 전문가 : 정수장 설계, 감리, 운영경험자 및 기술사 포함 인력Pool 19명 구성

					(총괄) 생 산 부 장
		민간 전문가 자문단 (Pool)									기술지원 자문팀 (물연구원 수처리연구과)
팀별
진단 총괄팀 (생산관리과)				수질ㆍ공정관리팀 (수질과)						설비운영팀 (기전설비과)					시설진단팀 ( 기술진단과)
ㆍ운영총괄 및 회의주관, 관리 ㆍ수리, 계열화, 물질수지				ㆍ세부공정별 수질관리, ㆍ공정운영 관리						ㆍ공정별 설비운영 효율 ㆍ공정계열화 및 운영					ㆍ기술 검토 및 자문 (현장자문 병행)

○ 조직 구성    ※ 총괄 추진부서 및 운영자 : 생산부 (이규현ㆍ장현성)

- 팀별 반장 : 참여부서 과장  (임무) 진단 과제에 따라 소속직원 참여 및 업무지정 · 진단수행

- 추진 일정 및 진단과제

계획수립ㆍTF팀 구성 ('21.1)		생산시설 진단 ('21.2~‘22.12)		진단보고서 도출 (‘22.12)
·시설진단 및 추진방향 설정 ·TF팀 구성 (민간 전문가참여)		· 공정별 시설진단(현장병행) · 공정별 문제점 도출 (중점) 공정별 계열화 운전 공정간 동수구배 등 취수장~정수장이격,전오존		·진단결과 활용 (재건설 사업반영) ·서울형 생산시설 표준모델 구축 ·개선방안 마련 용역 (필요시)

□ T/F팀 주요 검토사항 및 시설 진단계획

○ 주요 검토사항

❖『상수도시설기준』근거로 운영상 문제점 및 현장의견 수렴 ⇒ 개선방안 도출

- 공정별 문제점에 대한 자체 진단 및 전문가 참여 토론을 통한 문제점 도출

❖ 표준 및 고도처리시설 공정운영 전 과정의 문제점 발굴 및 효율화 방안

- 취수장 ~ 정수장 도수시설 운영 및 수질개선, 공정별 수리적 운영 (동수구배)

- 공정별 계열화 운전 및 공정간 연계, 고도시설 운영상 문제점(비상시설 확보)

❖ 유충관련 공정개선 및 기타 정수장 공정 운영 시 발생한 문제점ㆍ보완대책

○ 시설진단 추진계획

- 진단범위 : 6개 정수센터 취수 ~ 배출수 생산관리 전공정

- 진단방법 및 공정별 추진일정 : 공정별 5단계로 구분 추진

① 취 수		② 응집~ 여과		③ 오존,활성탄		④ 정수ㆍ배출수		⑤ 최종보고
‘21.2~6월		‘21.7~12월		‘22.1~22.6월		‘22.7~12월		‘22. 12월

※ 진단 일정은 최초 2년으로 추진 (진단 일정 및 공정별 일정은 추진속도에 따라 조정)

□ 운영계획

○ 운영기간 : ‘21. 1 ~ ’22. 12월 (필요시 운영기간 연장)

○ 회의개최 : 공정 진도 및 추진 상황에 따라 시행   ※ 공정보고 반기별 1회

- 장 소 : 운영여건에 따라 본부회의 및 정수센터 현장개최 병행

○ 추진절차                                                (단위:1개 주제별)

검토 자료배포	⇨	자체진단 자료검토	⇨	검토결과 제출 (문제점 및 결과)	⇨	TF팀회의	⇨	성과물 관리
총괄팀		각팀,정수센터		각팀 ⇒총괄팀		전문가 및 각팀		총괄팀

□ 향후 추진계획

○ 착수회의 및 진단 TF팀 구성ㆍ운영   :   ‘21. 2월 ~

○ 6개 정수센터 시설진단 추진         :    ‘21. 2월 ~ ‘22. 11월

○ 진단결과 및 운영결과 최종보고      :    ‘22.12월(예정)

Ⅳ		행정사항

□ 부서협조 사항

○ TF팀 참여 부서 및 정수센터 적극 협조

- 대  상  : 생산부 4개과, 물연구원(수처리연구과),  6개 정수센터

- 정수센터 현장 진단 및 관련 직원의 회의참석 자료제출 등 적극적 참여

- TF팀 구성 부서의 적극적인 참여 협조

□ 전문가 자문비용 지출

○ 자문회의(진단) 비용 지출

- 외부위원 : 150천원/인    ※ 분야별 3~4인/회 참여 예정

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 일반운영비(사무관리)

첨부 : 1. 일정별 사업세부 추진계획

2. 관련 분야 민간 전문가 자문위원Pool 명단. 끝.

붙임 1		‘21 ~ ’22년 일정별 세부 추진계획(안)

일 자	시설진단 추진 주요일정
‘21. 2	□ 생산시설 공정진단 kick-off 회의 (착수보고) - 일 시 : ’21. 2. 19(금) 예정 - 참석자 : 부본부장 및 생산부장 외 TF팀 - 주요내용 : 생산시설 기술진단 추진계획 보고 · TF팀 구성 및 운영 계획 및 진단계획 보고
2~6월	□ 시설 운영현황 및 시설진단 (취수시설) - 기 간 : ’21. 2.20 ~ ‘21. 6.30 - 진단대상 : 6개 정수센터 취수시설 전반 - 진단내용 : 취수원, 취수탑 등 시설전반의 수질ㆍ운영관리 진단 취수장~정수장간 도수관로 적정이격거리 적정성 검토(전오존,염소)
7~12월	□ 시설 운영현황 및 시설진단 (응집ㆍ침전ㆍ여과) - 기 간 : ’21. 7.1 ~ ‘21. 12.30 - 진단대상 : 6개정수센터 응집~여과공정 전반 - 진단내용 : 구조물 계열화 운전 및 침전, 공정효율 등 운영관리 진단
12월	□ 중간 공정 보고회 - 일 시 : ’21. 12. 22(수) 예정 - 참석자 : 부본부장 및 생산부장 외 TF팀 - 주요내용 : 취수~여과공정 생산시설 기술진단 경과보고 · 도출된 문제점 및 개선방안 토의
‘22.1 ~ ‘22.6	□ 시설 운영현황 및 시설진단 (오존~활성탄) - 기 간 : ’22. 1 ~ 22. 6. - 진단대상 : 6개정수센터 고도시설 공정 전반 - 진단내용 : 고도시설 운영문제점 및 활성탄지 운영방법,시설개선 등 활성탄지 By-Pass관로 및 비상시설 확보방안 등

일 자	시설진단 추진 주요일정
7~12	□ 시설 운영현황 및 시설진단 (정수 및 배출수) - 기 간 : ’22. 7. ~ 11.30 - 진단대상 : 6개정수센터 정수ㆍ송수 및 배출수 공정 - 진단내용 : 정수 및 송수 문제점 진단, 배출수 수질개선 시설운영 최근 도입공정의 운영효과분석 및 운영상 개선사항 발굴
12월	□ 최종보고회 개최 - 일 시 : ’22. 12. 22(수)예정 - 참석자 : 부본부장 및 생산부장 외 TF팀 - 주요내용 : 생산시설 진단경과보고, 공정별 진단내용 보고 정수센터별 문제점 및 개선방안 보고, 성과관리계획 보고

붙임 2		참여 전문가 자문단 POOL

연번	성명	직책	소 속	추천분야
1	최태용	처장	한국상하수도협회 물산업지원처장	토목/상수도
2	최준석	수석연구원	한국건설기술연구원	기계/상수도
3	신홍섭	부사장	한꾹종합엔지니어링(주)	상수도/공정
4	권병효	부사장	동해종한기술(주)	상수도/플랜트
5	여두현	상무	유신엔지니어링	기계/상수도
6	문숙주	부장	한국수자원공사 한강물관리처	기계/상수도
7	박종덕	부장	한국수자원공사 설계처	제어/상수도
8	안장환	부장	한국수자원공사 설계처	전기/상수도
9	임묘택	교수	고려대학교 전기공학부	전기
10	이근채	부사장	㈜도화엔지니어링	토목/상하수도
11	유선민	본부장	서영엔지니어링(주)	토목/상하수도
12	박재형	대표	㈜지앤씨환경솔루션	상하수도/ 물질수지
13	임건혁	위원	한국환경공단	상하수도/수질
14	허방련	위원	한국환경공단 시니어 자문위원	상하수도/수질
15	송영주	부장	서영엔지니어링(주)	토목/상하수도
16	정찬웅	부사장	동산엔지니어링(주)	상하수도/전기
17	박종훈	상 무	도화엔지니어링(주)	상하수도/기계
18	박종문	부사장	동명기술단	상하수도/기계
19	김대환	부사장	동명기술단	상수도/플랜트