문서번호	기전과-565
결재일자	2021. 2. 2.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
이성도		02/02 代김흥식
협조

『서울 C-ITS 실증사업 3차』

원인자부담공사 실정보고에 대한 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 2.

강서도로사업소

(기전과)

『서울 C-ITS 실증사업 3차』

원인자부담공사 실정보고에 대한 검토보고

우리사업소에서 승인한 교통안전시설(신호) 원인자부담공사와 관련    실정보고가 제출되었기에 검토보고 드림.

Ⅰ		관 련 근 거

교통정보과-1332(2021.01.26.)호

C-ITS감2021-0126-03(2021.01.26.)호

Ⅱ		공 사 개 요

공 사 명 : 서울 C-ITS 실증사업(장기3차)

원 인 자 : 교통정보과

공사기간 : 2020.11.03. ~ 2020. 12. 31.

공사장소 : 영등포구 여의도 서울교교차로 외 20개 교차로

공사개요 : 교통신호제어기 교체 공사

관련업체 및 주요설치 내용

구 분	설 계	감 리	시공업체	승인주요내용
신호기	㈜동림티엔에스	㈜문엔지니어링	㈜성남신호	· 제어기 교체 13대 · 제어기 부분품 설치 23대

Ⅲ		감리사 실정보고 내용

보고내용

- 계약 변경에 따른 사업기간 및 물량변경

공사기간 변경내용

구 분	승인전	승인후	비 고
공사기간	2020.11.03. ∼ 2020.12.31.	2020.11.03. ∼ 2021.04.30.	120일 증

물량변경내용

구 분	변경내용		비 고
	변경전	변경후
제어기	- 13대 교체	- 13대 교체
제어기 부분품	- 23대 설치	- 25대 설치	영등포R CVIB 1모듈에서 3모듈로 변경

Ⅳ		검 토 결 과

감리사 실정보고에 대하여 승인하고자 함

Ⅴ		행 정 사 항

원인자 및 유관기관(업체) 승인통보

붙임 1. 협조요청 및 감리사 검토의견서 1부.

2. 설계변경내역서 및 설계도면(변경전후) 1부.  끝.