문서번호	총무과-3446
결재일자	2021. 2. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		별관운영팀장	총무과장
신정석		김명용	02/02 김혁
협조

서소문청사 임시사무공간 통신공사 계획

2021. 1.

행 정 국

(총 무 과)

서소문청사 사무환경개선에 따른 통신공사 계획

서소문청사 1동 사무환경개선공사에 따라 구내 정보통신망을 구축하여 쾌적하고 원활한 업무환경을 조성하고자 함

□ 추진배경

○ 서소문청사 등 사무환경개선사업 추진계획(총무과-31075,’20.10.26)

○ 서소문청사 1동 사무환경개선공사 발주계획(총무과-37456,’20.12.28)

□ 추진계획

○ 사 업 명 : 서소문청사 사무환경개선에 따른 통신공사(단가)

○ 사업기간 : 착공일로부터  ’21. 11. 30. 까지

○ 대    상 : 서소문청사 1동 18개 부서 668석

층	개 선 대 상(좌석수)	계
2	문화시설추진단장(2), 박물관과(41), 문화시설과(21), 친환경기동반(8)	72
6	주차계획과(31)	31
8	물순환안전국장(2), 물순환정책과(41), 물재생계획과(29), 하천관리과(33), 물재생시설과(37)	142
9	세제과(29), 세무과(72), 계약심사과(49)	150
10	재무국장(2), 재무과(49), 자산관리과(33), 38세금징수과(41)	125
12	자원순환과(33), 생활환경과(25), 환경시민협력과(27), 차량공해저감과(63)	148

※ 사무공간 실제 조성 결과에 따라 통신공사 소요예산 및 일정 변경가능

○ 내    용 : 행정정보통신망(LAN) 및 인터넷전화, FAX 설치

- 기존배선 철거 및 배관배선공사, UTP케이블 포설, 몰드 설치

- 개인별 인터넷전화회선 및 아날로그 통신회선(FAX) 설치

- 행정정보통신망은 설치 후 정보통신보안담당관에서 운영

○ 소요예산 : 54,720천원 (세부내역: 붙임1)

구 분	금 액(원)	비 고
재료비	6,586,000	UTP, 아울렛, 몰드 등
노무비	28,647,120
경비	6,389,417	산재보험료, 고용보험료 등
기타경비	8,127,435	일반관리비, 이윤
소 계	49,749,972
부가가치세	4,974,997
총 계	54,720,000	(천원이하 절사)

○ 예산과목 : 행정운영경비, 행정지원체계 강화, 쾌적하고 안전한 청사관리, 시설비

○ 계약방법 : 수의계약(단가)

- 수의계약 근거 : 지방계약법 시행령 제25조 제1항제5호 마목 2)여성기업

- 수의계약 사유 : 추정가격 5천만원 이하의 소액이며, 신속하고 효율적인 사업추진을 위해 청사통신공사 경험이 풍부한 업체를 선정

- 단가계약 사유 : 대상부서의 요구사항에 따라 실제 사무실 구조에 유동성이 있어, 실제 공사이후 정산을 통해 집행하고자 함

□ 추진일정

○ 계약의뢰 및 계약자선정	: ’20. 2.

○ 사업계약 및 통신공사 실시	: ’20. 2.~11.

붙  임 : 1. 설계내역서 1부.

2. 공사시방서 1부.

3. 건축도면 1부.  끝.