문서번호	교량안전과-1695
결재일자	2021. 2. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
이제택		박찬규	02/03 하현석
협 조

『2021년 강교 보수공사(연간단가)』

발 주 계 획 보 고

2021.  2.

안전총괄실

(교량안전과)

『2021년 강교보수공사(연간단가)』

발 주 계 획 보 고

강구조시설물 노후로 인한 부식, 도장 불량부에 대한 보수 및 보강을 적시에 시행하기 위한  「2021년 강교 보수공사(연간단가)」 의 발주 계획을 보고 드림.

Ⅰ		관련근거 및 사업개요

□ 관련근거

○ 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법

□ 사업개요

○ 대    상 : 강구조 도로시설물 총 49개소(교량안전과 관리)

(한강교량-19개, 고가차도-12개, 일반교량-18개)

-  년간 약 10개소 시설물에 대해 보수

○ 사 업 비 : 500,000천원(도급비 488,000천원, 이전비 12,000천원)

※ 예산과목 : 교량관리, 한강교량관리, 강교도장보수공사,

시설비 및 부대비, 시설비

○ 주요 공사내용

- 도장결함 및 부식부 도장보수 : 약 10개 시설 2,400㎡

- 강재 손상부 보수 : 용접 및 절단 약 60m, 볼트교체 약 50개, 잡철물 제작 및 설치 1.2ton 등

□ 주요공종

- 도장공(77.7%), 강구조물공사(4.7%), 부대공(17.6%)

※ 본 공사는 약 10개 시설물에 산재되어 있는 소규모 도장보수와 강재 손상부를 적시에 보수하기 위한 연간단가 공사로써, 강구조물공사는 도장을 위한 부대공종으로 주된공사인 도장공사업으로 발주

Ⅱ		공사발주 및 관리계획

공사입찰방법

○ 입찰방식 : 제한경쟁입찰(실적제한)

○ 입찰참가자격

- 「건설산업기본법」에 의한 종합공사 중 “토목공사업(토목건축공사업)”을 등록한 건설사업자 또는 전문건설업 중 도장공사업 또는 시설물유지관리업을 등록한 건설사업자로 입찰공고일 전일부터 입찰일(낙찰자는 계약체결일, 적격심사 대상자는 적격심사서류 제출일)까지 등록기준을 갖추고 시공 중에 유지할 수 있는 건설사업자

- 적격심사시 수행능력평가의 시공경험평가기준은「시공실적으로 입찰참가자격을 제한한 경쟁입찰공사」로 심사

※ 입찰공고일 전일 기준 최근 10년 이내 준공검사가 완료된 단일건으로 도로법 제10조에 따른 도로 중 고속국도, 일반국도, 특별시도, 광역시도, 지방도 또는 시도에 설치된 교량(철도교량 포함)중 강교도장(중방식)이 800㎡이상 준공실적을 보유한 업체

- 지역의무 공동도급 대상 공사로 지역업체(서울특별시 주된 영업소를 둔자) 시공참여비율은 49%이상, 공동수급체의 구성원 수는 대표사 포함 2개사 이내로 하며 공동수급체 구성원의 계약참여 최소지분율은 5%이상

○ 하자담보책임기간 : 표면처리(SP3, SP10)를 포함한 강교도장 3년, 기타 1년(하자보증금율 3/100)

※ 관련근거 : 『건설산업기본법』제28조 제3항, 같은법 시행령 제30조 규정

한강교량 강구조물 도장 유지관리 개선방안(교량안전과-717호, 2018.1.16.)

강구조 교량 도장보수(연간단가) 시행 개선 방침(교량안전과-13897, 2020.8.18.)

공사기간 : 공사 착공일로부터 2021.12.10.일까지

Ⅲ		공사관리 및 향후계획

공사관리(시행)

○ 교량담당자별 각종 점검 및 순찰시 발견되는 결함사항에 대하여 조치계획 보고서작성, 작업지시 내역(도면 및 시방) 작성, 공사 책임관리, 공사완료 보고시 FMS 등록

- 보고서 작성시 공사담당자 및 팀장 협조 결재

○ 강교보수공사 공사담당자 작업지시(발주청 ⇒ 감리원)

- 교량담당자 및 팀장 협조 결재

향후계획

○ ’21.02. : 공사발주

○ ’21.03. : 공사계약 및 착수

붙임 : 1. 설계도면 1부.

2. 설계내역서 1부.

3. 작업지시서 및 완료보고서 양식 1부.  끝.