등록번호

교육아동청소년과-2161

주무관

돌봄지원팀장

교육아동청소년과장

생활복지친화국장

등록일자

2021.2.2.

이나리

서준범

정미선

전결 02/03

代정미선

결재일자

2021.2.3.

공개구분

대시민공개

협조

건축시설팀장

남경연

건축과장

代이순우

서울덕수초「중구형 돌봄교실」조성공사 계획

생활복지친화국

교육아동청소년과

서울덕수초「중구형 돌봄교실」조성공사 계획

우리구와 중부교육지원청 및 덕수초 간 업무협약에 따라 구에서 직영하는 학교안 돌봄교실을 새롭게 조성하여 질 높은 돌봄서비스를 제공하고자 함

Ⅰ	추진근거

□ 아동복지법 제4조(국가와 지방자치단체의 책무)

□ 서울특별시 중구 초등학생 돌봄 지원에 관한 조례 제7조

(돌봄시설의 설치·운영)

□ 학교시설을 활용한 「중구 모든아이 돌봄교실」운영 업무협약

´2020. 11. 10.

Ⅱ	공사개요

□ 공사범위 : 덕수초 수영부 생활관 2, 3층(324㎡)

□ 공사기간 : 2021. 2. ~ 2021. 8.(설계기간 포함)

□ 공사내용

- 수영부 생활관 2층에 위치한 기존 돌봄교실 2실 리모델링

(기존 사물함 리폼, 거실 구조물 철거 후 놀이공간 조성, 사무공간 조성 등)

- 수영부 생활관 3층에 위치한 VR실을 돌봄교실 2실로 신규조성

(급·배수, 씽크대, 온돌마루, 조명 교체, 냉난방기, 아동 책상·의자,   사물함 및 교구장, 책장, 신발장 등 가구)

〔공사범위〕

2층
3층

〔현장사진〕

2층
3층

Ⅲ	소요예산

□ 예산액 : 231,750천원

□ 산출내역

- 설계비 :  21,750천원

- 공사비 : 210,000천원

□ 예산과목 : 교육아동청소년과, 빈틈없는돌봄, 아동행복실현, 아동복지

증진, 중구모든아이돌봄사업, 시설비및부대비, 시설비

Ⅳ	계약방법

□ 설계 : 1인견적 수의계약(서울시 마을건축가 매칭)

□ 공사 : 경쟁입찰 계약

Ⅴ	향후계획

□ 설계용역 계약심사 : ´21. 2. 10. 한

□ 설계 발주 : ´21. 2. 17. 한 (교육아동청소년과)

□ 설계 착수 : ´21. 2. 22. 한 (설계시 건축과 협조)

□ 설계용역 준공 : ´21. 4. 21. 한 (내역검토 건축과 협조)

□ 공사 발주 및 시공사 선정 : ´21. 5. 31. 한

□ 공사 착공 : ´21. 6. 10. 한

□ 공사 준공 : ´21. 8. 9. 한.  끝.