“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신자	재무회계과장
(경유)
제 목	[암사2정수 탈수설비 개량 전기공사]변경계약(계약기간) 의뢰

1. 암사정수센터 탈수설비 개량 전기공사의 변경계약을 시행하오니 조치하여주시기 바랍니다.

가. 변경대상 : 암사2정수 탈수설비 개량 전기공사

나. 변경사유 : 벨트탈수기 유량기 신설에 추가설치에 따른 배관배선 작업 등

다. 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 정수장시설정비, 시설비및부대비, 시설비

라. 변경내역

구 분	당초	변경
계약기간	’20.11.26. ∼ ’21.1.29.	’20.11.26. ∼ ’21.2.5.
계약금액	85,930,000원	(변경없음)

붙임  1. 합의서 등 2부.

2. 설계변경 검토보고 1부.  끝.

	생산부장
주무관	김인준		기전설비과장	최강욱		생산부장	01/29 서대훈
협조자	주무관	박상진
시행	기전설비과-1002	(		)	접수		(		)
우	04770	서울시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1334	/전송	02-3146-1319	/	duulnet@seoul.go.kr	/	부분공개(3)