투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	송파구 송이로30길 7 (주)동일기술공사 대표자 귀하
(경유)
제목	기술용역[한강공원 나들목 신설(증설) 설계] 과업내용 변경 알림

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 본부와 계약 체결하여 시행중인 「한강공원 나들목(노들나루, 자양) 신설(증설) 기본 및 실시설계 용역」과 관련하여 아래(붙임)와 같이 과업내용이 변경됨을 알려드립니다.

3. 변경 된 과업내용에 의거 ‘노들나루 나들목 신설 설계(과업)’에 대한 잔여설계는 중단하고, 추후 설계변경(계약금액 조정) 계약 체결 등 후속사항을 이행하여 주시기 바랍니다.

가. 관련근거

1) 과업내용서 1.15.(과업내용의 변경 조건) 및 1.16.(설계변경 등)

- 지자체 및 관계기관의 협의, 발주기관의 계획의 변경된 때

- 과업 수행 중 발주기관의 계획변경으로 인한 과업내용 변경이 있는 경우

2) 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제14장 용역계약 일반조건

- 제6절 과업내용의 변경과 계약금액 조정 제6절 제1호 가목

나. 변경사항 : 노들나루 나들목 신설 설계 과업 중단(제외)

다. 조치사항

1) 현재 진행중인 노들나루 나들목 신설 설계 잔여과업 전면 중단

2) 조속한 시일 내 계약금액 조정(감액)에 대한 변경계약 체결

※ 자양 나들목 설계용역 과업은 정상 추진

붙임 과업내용서 주요 변경(제외) 사항 1부. 끝.

	서울특별시한강사업본부장
★주무관	이성연		치수과장	전결 02/01 최연호
협조자
시행	치수과-717	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 1동 8층 (서소문동)	/
전화	02-2133-3856	/전송	02-2133-1042	/	richyon@seoul.go.kr	/	부분공개(5)