문서번호	녹색에너지과-2854
결재일자	2021. 2. 1.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	신재생에너지팀장	녹색에너지과장
신명희	김광찬	02/01 김호성

2021년신재생에너지(융·복합지원)  보급사업 추진계획(서대문구)

2021. 02.

기후환경본부

(녹색에너지과)

2021년 신재생에너지(융·복합지원)보급사업 추진계획(서대문구)

상업통상자원부 주관 공모사업인「2021년 신재생에너지(융·복합지원) 보급사업」에 선정된 서대문구에 태양광발전시설을 설치하여 에너지자립 혁신지구 조성하고자 함

Ⅰ		사 업 개 요

□ 사업개요

○ 근    거

- 서울특별시 에너지자립 혁신지구 모델조성 공모사업 선정(에너지시민협력과, ’19.07.22)

- 산업통상자원부 2021년 신재생에너지(융·복합지원)사업 수요조사 공고(산업통상자원부 공고(제2020-196호))

- 2021년 신재생에너지 융복합지원사업 공개평가 결과(한국에너지공단 신재생에너지보급실-2759(2020.7.6.))

○ 기    간 : ’21. 1월 ~ 12월

○ 총사업비 : 307,362,000원(국비 50%, 지자체·민간 50%)

- 국비 : 145,020,000원

- 지자체(시·구 1:1 매칭) : 109,907,000원(시·구 각 54,953,500원)

- 민간부담 : 52,435,000원

○ 사업내용 : 신재생에너지(태양광 발전시설) 151KW 설치

	2021 신재생에너지 보급사업
□ 사 업 명 : (산업통상자원부 주관) 2021년 신재생에너지(융복합지원) 보급사업 □ 사업규모 : 국비 1,122억 내외(2021년 예산 확정 후 지원규모 결정) ※ 서대문구 행정적 여건 등에 따라 사업 중지 또는 규모(사업비 등)가 축소될 수 있음 □ 사업내용 : 저층주택, 상업건물이 융합된 특정지역에 신재생에너지 설치

Ⅱ		추 진 계 획

□ 사업목적

○ 사업목적 : 신재생에너지 보급확대 및 융·복합 지역보급 효율성 향상

사업 목적		특정구역 내 신재생에너지 대단지를 조성함으로써 주택, 건물, 산업체 등 태양광 에너지적용 ICT구축		➡			설치대상 구역복합
기대 효과		➤ 온실가스 감축에 따른 지구온난화 등 기후변화(위기) 대응 ➤ 지역사회 맞춤형 융복합사업의 기획·발굴에 따른 신재생에너지 보급 확산 및 신재생에너지 주민수용성 제고 ➤ 주민참여형 신재생에너지 보급사업을 통한 에너지시민 활동역량 강화

○ 차별성 : 주민 부담금 절감 및 지역사회 태양광 보급 활성화(3Kw 기준)

구분	기존 주택형 태양광 설치지원	산업통상자원부 융복합지원사업
총 설치비용	6,500,000원	5,028,000원
기관지원금	3,583,760원 (시·구 1:1 매칭)	4,022,400원 (국 50%, 시·구 50%)
주민 자부담금	2,916,240원	1,005,600원

□ 사업주체 및 기관별 역할

○ 주관기관 : 서대문구

○ 참여기업 : ㈜한화솔루션, ㈜블루에너지, 헤이트, 평산이엔에스

구 분	역 할
주관기관	신·재생에너지 설치비 예산확보(시·구비) 및 집행, 사업 총괄
참여기업	주민 협력사항, 신·재생에너지 설계, 설치, 유지보수, 모니터링 수행 · 한화솔루션(주) : 태양광설비 총괄 · ㈜블루에너지 : 태양광 설치, 유지보수 · 평산이엔에스(주) : 태양광설비 설계 및 감리 · ㈜헤리트 : 모니터링 설치·운영 및 유지보수

□ 추진내용

○ 신재생에너지(태양광 발전시설) 설치

- 설치기간 : 2021. 1월 ~ 12월

- 대상지역 : 북가좌동, 홍은동 일대 39개소(주택34개소, 건물5개소)

※ 공모사업 참여시, 태양광 발전시설 설치 동의서를 제출한 가정 및 건물

- 발전용량 : 총 151KW

- 사업비 집행 : 사업 착수 시점 선급금 지급(정부 보조금의 70% 이내),설치확인 완료 후 잔여보조금 지급

※ 태양광 모니터링 구축 시 ‘서울시 에너지 데이터 표준 가이드라인’을 준수하여 설치.

○ 신재생에너지(융복합지원) 보급사업 홍보 등

- 한국에너지공단 에너지자립마을 인증 추진

- 도시재생지역 포함 서대문구 관내 전지역 확장을 위한 수요조사 실시

- 태양광발전소 설치 세대 대상 에너지절약 실천 교육 운영

- 성과 보고회 개최

□ 기대효과

○ 신재생에너지 보급에 따른 화석에너지 대체량

- 화석에너지 대체량 : 48.4toe/년(151kwp(설비용량) * 0.318(환산계수))

※ 태양광 연간 생산량 : 177,828kwh(151kw*3.2h(발전시간)*365일)

○ 온실가스 발생량 감소

- 태양광 78.5tCo2(전기발전부문)(177,828MWh * 0.4415tCo2/MWh)은 약 6,434그루 숲 조성효과

※ 30년생 나무 1그루 연간 Co2 흡수량 : 12.2Co2(잣나무 기준)

○ 지자체 활성화 기대

- 서대문구 에너지 수입 의존도 감소

- 에너지 자립을 통한 지역주민 에너지 비용절감 복지 혜택

- 전기료 절약 및 국가 전력위기 관리에 이바지

Ⅲ		향 후 계 획

□ 일  정

○ ‘21. 02월 : 서대문구 ↔ 참여기업 협약체결

○ ‘21. 02월 : 시청 ↔ 서대문구 (시비 지원금 교부)

○ ‘21. 02월 : 실시설계 및 주민설명회

○ ‘20. 03월 ~　10월 : 설치

○ ‘20. 10월 ~　11월 : 설치 확인 및 점검

○ ‘20. 12월 : 사업결과 보고

□ 예  산

○ 소요 예산 : 307,362,000원

- 국비 145,020,000원, 시비 54,953,500원, 구비 54,953,500원

- 민간 52,435,000원

※ 따로붙임 : 추진계획(서대문구), 총사업비 산출내역서, 태양광설치 장소리스트 및 사업비