문서번호	주거환경개선과-1607
결재일자	2021. 2. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주거환경계획팀장	주거환경개선과장
김남경		이상구	02/04 김장수
협조

낙산성곽길 정비사업

시설물 인수·인계 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 02.

도시재생실

(주거환경개선과)

낙산성곽길 정비사업

시설물 인수·인계 계획

▢ 사업개요

○ 공 사 명: 낙산성곽길 정비공사

○ 위    치: 종로구 종로6가 69번지 일대(낙산성곽서길 구간주변)

○ 기    간: 2019.11.11.~2020.12.15.

*********************************************

********************************************

********************************************

○ 도 급 자

****************************

**************************

○ 사업규모: 서울디자인지원센터~낙산공원 정상부 순성길 정비

- 규 모: 연장 863m, 면적 15,220㎡, 폭 15m내외

- 내 용: 도로 및 조경시설 정비, 순성길 정비, CCTV 신설, 주민쉼터 조성 등

▢ 추진경위

❍ ’19. 9.	: 공사시행 협조 요청(→도시기반시설본부)

❍ ’19.10.	: 낙산성곽길 정비공사 및 전기통신공사 시행

- 토목·조경공사: 도기본 방재시설부, 전기·통신공사: 도기본 설비부

❍ ’19.11.11.	: 공사 착공

❍ ’20.2.~ 9.	: 주민설명회 및 토목공사(하수관 및 도로정비 등) 시행

❍ ’20.9.~12.: 조경 및 전기·통신공사 시행

❍ ’20.12. 8.	: 예비준공검사 시행(도기시기반시설본부)

- 참석: 총 18명(주거환경개선과 2, 도기본 4, 중부녹지사업소 3, 종로구청 5, 시공사 4)

***************************************************

❍ ’20.12.17.	: 공사 준공

▢ 시설물 인수·인계

❍ 인수·인계 시설물 내역

구 분		인 계 내 용	비 고
토목	시 설 물	도로시설물 및 포장, 하수관, 맨홀, 집수정 및 측구	인수인계 목록 참조
	관련서류	준공도면, 하자보증증권 등
조경	시 설 물	관목/수목식재, 초화/잔디, 휴게시설, 순성길, 장대석, 조경시설 등
	관련서류	준공도면, 하자보증증권 등
전기	시 설 물	가로등, 공원등, 볼라드등, 분전반
	관련서류	준공도면, 하자보증증권 등
통신	시 설 물	CCTV 및 통신맨홀
	관련서류	준공도면, 하자보증증권 등

❍ 인수·인계 방법

- 예비 준공검사 및 준공검사 결과에 따라 시설물 인수·인계서 작성 후 시설물 유지관리기관에 이관

· 도시기반시설본부장(인계자) → 서울특별시 도시재생실장(인수·인계자) → 각 시설물별 유지관리기관장(인수자)

- 관련근거

· 공사완료보고_낙산성곽길 정비공사(도기본 방재시설부-18476,’20.12.30.)

▢ 행정사항

❍ 인수·인계서에 각 기관장 직인날인 후 송부

붙임: 1. 인수·인계서 각 1부.

2. 준공검사 및 준공정산 결과보고 1부.

3. 준공사진대지 1부.  끝.