문서번호	현장민원과-1839
결재일자	2021. 2. 4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

						시 민
주무관		현장민원과장		북부수도사업소장
정상호		변정호		02/04 박동석
협 조
	주무관				홍순재

2021년 수도계량기 교체 및 정비계획

2021. 2.

북부수도사업소

(현장민원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

2021년 수도계량기 교체 및 정비계획

2021년 고장 및 검정유효기간 경과 계량기의 적기 교체와 폐전계량기 철거 등으로 정확한 사용량 계측과 깨끗하고 안전한 아리수 공급에 기여

Ⅰ. 현 황

□ 최근 5년간 계량기 교체실적

구 분	계	만기계량기	폐전계량기	고장계량기
평균	35,547	30,266	1,543	3,737
2016	35,039	31,169	1,474	2,396
2017	35,619	31,119	2,081	2,419
2018	33,333	24,597	1,121	7,615
2019	37,795	31,884	2,283	3,628
2020	35,949	32,562	758	2,629

□ 추진부서별 인원 및 담당업무

구 분	인원	담 당 업 무
현장민원과	4명	- 고장계량기 교체, 교체장애 정비, 서울시설공단 지도·감독, 자재수급
서울시설공단	8명	- 만기·동파(겨울철)계량기 교체, 폐전계량기 철거, 역류방지밸브 설치

□ 2020년도 업무처리 현황

구 분	계	만기계량기	폐전계량기	고장계량기
연간목표(개)	36,046	30,646	2,600	2,800
작업실적(개)	35,949	32,562	758	2,629
비 고		106.2	-	시설공단 동파교체 256개 포함

- 만기 수도계량기 교체는 106.2%로써 목표대비 1,916개 초과 달성함

- 서울시설공단 교체 : 33,576(만기 32,562 폐전 758 동파 256)

※ 교체원 1인당 4,197개 교체(33,576개/8명)

Ⅱ. 추진개요

○ 수도계량기 교체 업무

구 분	추 진 기 간	실행부서	업 무 내 용
1. 수도계량기 교체
ㅇ 만기계량기	’21. 3. 1 ∼ 11. 30	서울시설공단	- 검정유효기간이 경과한 계량기 교체
ㅇ 동파계량기	’20. 12. 1 ∼’21. 2. 28	서울시설공단	- 겨울철 한파로 계량기가 파손된 경우 교체
ㅇ 고장계량기	’21. 1. 1 ∼ 12. 31	현장민원과	- 계량기 회전불량·멈춤 등 이상이 발생한 경우 교체
2. 폐전계량기 철거	’21. 1. 1 ∼ 12. 31	서울시설공단	- 급수전 폐전 계량기 철거
3. 교체장애수전 정비	’21. 1. 1 ∼ 12. 31	현장민원과	- 매몰 등으로 계량기를 교체하지 못한 수전정비

○ 교체목표

구분	계	만기	폐전	고장
수량	43,353	38,103	2,500	2,750

<근거 : 2021년 수도계량기 교체 계획(본부 계측관리과-488, 2021. 1. 14)>

- 서울시설공단 교체 물량 : 40,603(만기+폐전+동파)

․ 폐전 및 동파가 적을 경우 과년도 만기 교체대상에서 교체

․ 전년도에 비해 만기교체 목표량이 많아 서울시설공단 교체원 증원 필요.(전년도 대비 약 7,000개 증가)

- 사업소교체물량 : 2,750(고장)

․ 고장발생에 따라 교체하므로 고장발생이 적을 경우 목표달성에 어려움이 예상됨.

Ⅲ. 추진계획

1		수도계량기 교체

고장이 발생하였거나 검정유효기간이 만료된 계량기 등을 적기에

교체하여 급수사용량 계측의 정확성 제고

□ 만기계량기 교체

○ 목표 : 38,103수전(본부 계측관리과 목표설정)

- 현년도 만기대상 수전

구 분	계	15mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm
건수(개)	36,277	33,265	1,136	755	782	230	109
강북구	7,879	6,320	610	401	401	109	38
도봉구	5,159	4,470	272	143	184	62	28
노원구	23,239	22,475	254	211	197	59	43

- 과년도 미교체 수전

구 분	계	15mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm
건수(개)	10,778	9,432	543	358	148	181	116
강북구	3,263	2,763	245	126	45	50	34
도봉구	1,915	1,496	156	100	51	72	40
노원구	5,600	5,173	142	132	52	59	42

○ 추진기간 : ’21. 3. 1. ~ 11. 30.

○ 교체인력 : 서울시설공단 8명(반장 1, 교체원 7)

○ 작업지시

- 대상 확인 : 아리수 인포시스템의 만기교체 대상

- 대상 배분 : 현년도 만기 대상 및 과년도 만기 대상을 교체대행시스템으로 배분

○ 교체작업

- 대상확인 : 서울시설공단에서 대행업무시스템으로 확인

- 대상배분 : 교체원 개인별 PDA에 전송하여 작업배정

- 교체작업 : PDA에 전송된 교체대상을 교체하고 작업내용을 PDA로 실시간 현장 입력

□ 동파계량기 교체

○ 교체대상 : 겨울철 발생한 동파계량기

○ 추진기간 : ’20. 12. 1. ~ ’21. 2. 28.

○ 교체인원 : 서울시설공단 8명(반장 1, 교체원 7)

○ 추진내용

- 겨울철 발생한 수용가의 동파계량기를 신속하게 교체

- ’21. 3.월 이후 검침 시 발견되는 동파계량기는 3월 소통회의에서 서울시설공단과 협의 하여 사업소 교체 또는 서울시설공단 교체 추진

□ 고장계량기 교체

○ 교체대상 : 15mm~50mm 소형계량기 중 고장발생 계량기

○ 교체건수 : 2,750건(예상)

○ 교체기간 : ’21. 1. 1. ~ 12. 31.

○ 교체인원 : 현장민원과 2명

○ 추진내용 : 요금과에서 교체 요구한 고장 수도계량기를 처리기한(5일 이내) 내에 교체하고 전산입력 처리

2		폐전수전 수도계량기 철거

수용가의 신청 등에 의거 사용 중인 급수전이 폐전된 경우 수도    계량기를 적기에 철거(회수)

□ 추진개요

○ 목    표 : 2,500개(서울시설공단 동파교체 포함)

※ 수용가의 폐전요청이 적을 경우 만기교체로 대체

○ 철거대상 : 수용가 급수전 폐전 계량기

○ 기    간 : ’21. 1. 1. ~ 12. 31.

○ 철거인원 : 서울시설공단 8명(반장 1, 교체원 7)

○ 추진내용

- 요금과에서 폐전처리 후 철거를 요구한 수도계량기 철거(5일 이내)

□ 폐전절차

폐전신청	➠	폐전처리	➠	계량기 철거	➠	인입관 폐쇄
(수용가)		(요금과)		(서울시설공단)		(급수·시설과)

3		교체장애 수전 정비

고장, 만기 등의 사유로 수도계량기를 교체하고자 하였으나, 관노후, 매몰, 장애물 적치 등의 장애로 교체하지 못한 경우 이를 정비하여 해소

□ 추진개요

○ 정비기간 : ’21. 1. 1. ~ 12. 31.

○ 소요예산 : 56,481천원(배급수비, 교체장애수전 정비)

- 현장민원과 교체장애수전 정비요청에 의해 공사부서에서 집행

○ 추진내용

**********************************************************************************************

****************************************************************************

************************

Ⅳ. 행정사항

○ 서울시설공단 업무협의 추진 : 3월중 소통회의 실시

- 교체원 2명 증원 필요성 등 협의

○ 서울시 귀책 교체장애 정비 : 급수운영과, 시설관리과

○ 수용가 귀책 교체장애 정비 : 현장민원과, 요금과
○ 계량기 교체중 누수발생 시 긴급 복구 지원 : 시설관리과

- 업무수행 중 시설노후, 장애요인 등에 의한 누수 및 안전사고 발생 시  복구 등 적극 협조.

붙임 1. 현년도 만기대상 1부.

2. 전년도 만기대상 1부. 끝.