투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	동작구청장(주택과장)
(경유)
제목	동별 사용검사 신청에 따른 업무협의 회신

1. 동작구 주택과-4668(2021.2.4.)호와 관련입니다.

2. 상도역 지역주택조합 동별 사용검사 신청과 관련하여 귀 기관에서 문의하신「신상도 지하차도 확장공사」의 준공기한은 현재 2021.6.30.이나, 금년 2월 중 변경계약(공사기간 연장) 예정이며 건설사업관리단으로부터 제출된 예정공정표에 따라 2021.12.31. 공사 완료 예정임을 알려드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

붙임  예정공정표 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이시연		방재시설과장	김태중		방재시설부장	02/04 代김태중
협조자
시행	방재시설부-1629	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동)프리미어플레이스빌딩 14층	/
전화	02-3708-8764	/전송	02-3708-8756	/	siyeon0907@seoul.go.kr	/	부분공개(5)