문서번호	사회적경제담당관-1681
결재일자	2021. 2. 8.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
★주무관		사회적경제기반조성팀장	사회적경제담당관
문덕기		박준영	02/08 홍남기
협조

가락 사회적경제 클러스터 조성공사

인테리어 공사(건축, 기계) 변경 시행계획

2021. 2.

사회적경제담당관

가락 사회적경제 클러스터 조성공사

인테리어 공사(건축, 기계) 변경 시행계획

가락 사회적경제 클러스터 조성공사중 당초 계획인 FCU(팬코일유닛) 설치를 시스템에어컨으로 변경 설치 후 클러스터 조성에 만전을 기하고자 함.

□ 추진근거

○ 서울시 사회적경제 기본조례 제15조(시설비 등 지원) 및 제16조(재정지원 등)

○ 사회적경제 먹거리클러스터 조성 및 운영계획(2020.10.11.)

- 사회적경제 먹거리 클러스터 조성계획 변경(2020.11.11.)

○ 사회적경제 먹거리클러스터 설계 및 공사계획(2020.11.19.)

□ 계약내용

○ 공 사 명 : 가락 사회적경제 클러스터 조성공사(건축, 기계)

○ 위    치 : 송파구 양재대로 932, 가락시장 청과동 3층

○ 규    모 : 연면적 : 1,130㎡

○ ****************

○ ****************************************

○ 공사내용 : 클러스터 조성을 위한 건축공사 및 기계설비 공사

○ 계약기간 : 2021. 1. 4. ~ 2021. 3. 24.

□ 변경계획

○ 변경내역 : 천장형 FCU → 천장형 시스템에어컨 설치로 변경

○ ***********************************************************************************************************************************

********

**************************************************

**************************************************************************

**********************************************************************************************************************

○ 변경내역 : 계약금액 변경없이 내역변경으로 추진

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증감액
***	***	**********	**********	**********
	***	**********	**********	**********
	****	**********	**********	**********
******		***********	***********	*********
*****		*********	*********	******
****		*********	*********	**********
******		*******	*******	********
****		***********	***********	**
*****		**********	**********	**
***		***********	***********	**
***********		***********	***********	*

□ 향후계획

○ 변경 의뢰 (→재무과)	: ‘21. 2. 5.

○ 검수 및 준공              : ‘21. 4.(예정)

붙임 : 1. 변경내역서 1부

2. 감리업체 의견서 1부

3. 합의각서 1부.  끝.