문서번호	설비부-1805
결재일자	2021. 2. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		환경설비과장	설비부장
정욱		김오열	02/08 김중영
협조

『시립동대문실버케어센터건립 소방시설공사』

설계변경(총차, 1차) 검토보고

2021. 01.

도시기반시설본부

(설비부)

『시립동대문실버케어센터건립 소방시설공사』

설계변경(총차, 1차) 검토보고

『시립동대문실버케어센터 건립 소방시설공사』와 관련하여 건설사업관리관리단으로부터 제출된 설계변경보고에 대해 검토 보고 드림

Ⅰ		공사개요

○ *****************************

○ **************************

○ *********************************

○ ***************************************************

○ ********************

○ ***************

○ ******************

Ⅱ		관련근거

○ 시립동대문 실버케어센터 건립 소방시설공사(총차,1차) 설계변경 내역서 검토 보고[PC21(동대문실버케어)-528호('21.02.03.)]

○ 시립동대문실버케어센터 건립 소방시설공사 실정보고 검토보고

[설비부-1220(`21.1.27.)]

Ⅲ		설계변경사항

○ 설계변경 사유

- 기 실정보고 승인 사항

· 1층 주차장 스프링클러헤드 변경 및 열선 추가 및 4층 열선 제외

· 3·4층 완강기 설치 및 고용개선지원비 반영

- 건축공정 지연으로 1차공사 준공기한(`21.2.15.) 내 시공이 불가능한 공정과 가능한 공정에 대한 물량 변경

· 1차 → 2차 : 소방펌프실 배관 및 밸브류 설치, 열선설치, 완강기 설치

· 2차 → 1차 : 소방펌프 설치

○ 공정별 금액 증감

- 총차

구 분	당초	변경	비고(증감)
소화배관공사	***********	***********	*******
내진설비공사	*********	*********	*******
열선설치공사	**********	**********	*******
완강기설치공사	*	*******	*******
상기공사 외 공사비	***********	***********	*
제경비	**********	**********	*******
고용개선지원비	*	*********	*********
소 계	***********	***********	**********
부가세	**********	**********	*********
합 계	***********	***********	**********

- 1차

구 분	당초	변경	비고(증감)
소화배관공사	**********	**********	**********
내진설비공사	*********	*********	*******
열선설치공사	**********	*	***********
완강기설치공사	*	******	*
상기공사 외 공사비	**********	**********	*********
제경비	**********	**********	**********
고용개선지원비	*	*********	*********
소 계	***********	***********	***********
부가세	**********	**********	**********
합 계	***********	***********	***********

○ 설계변경금액

구 분	당초	변경	비고(증감)
총 차	***********	***********	**********
1 차	***********	***********	***********

○ 건설사업관리관리단 검토의견

- 기 승인된 실정보고 1건 및 건축공사의 지연으로 1차공사 준공기한 내 시공이 불가한 소방공사 부분을 시공 가능한 부분부터 시공하기 위해 내역변경함이 적정함

Ⅳ		보고자의견

○ 기 승인된 설정보고 1건 반영 및 금회 계약물량 조정에 관한 건설사업관리단의 설계변경 검토의견이 타당하므로 이를 반영하여 설계변경을 시행하고자 함

붙임: 건설사업관리단 공문 1부.  끝.