투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전[건설사업관리기술인 배치기간 연장 승인통보(전기,통신,기술지원)]

1.업무지시현장 : 시립동대문 실버케어센터 건립 전기공사 ㈜성보전기, 주식회사 펨코엔지니어링, 시립동대문 실버케어센터 건립 통신공사 (주)국제비엠에스, (주)서영티이씨

2.작 성 일 자 : 2021-02-08 11:02:32

3.지 시 내 용

가. 건설사업관리단 PC21-522호(2021.02.01.)와 관련입니다.

나. 동대문 실버케어센터 건축공사의 공기 연장(95일)으로 인하여 후속 공정인 전기,통신공사의 공기 또한 연장됨에 따라 원활한 사업 추진을 위한 건설사업관리기술인(전기,통신분야)의 배치기간 연장요청을 승인하오니 공정관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

□ 승인내역

구분	분야	변경 전	변경 후	증‧감	비고
상주 기술인	전기	′20.06.26.∼′21.03.28.	′20.06.26.∼′21.07.28.	증) 122일	총괄부서의 최종승인 후 반영토록 함
	통신	′20.11.29.∼′21.03.28.	′20.11.29.∼′21.07.28.	증) 122일
기술지원기술인	전기	′19.07.29.∼′21.04.28.	′19.07.29.∼′21.07.28.	증) 9회
	통신	′19.07.29.∼′21.04.28.	′19.07.29.∼′21.07.28.	증) 3회

끝.

★주무관							임재욱			환경설비과장					전결 02/08 김오열
협조자
시행			설비부-1811									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층															/			http://infra.seoul.go.kr/
전화								/전송								/													/	부분공개(5)