의원 요구 자료 제출

시 행	공공개발기획단-1332	(		)
접 수		(		)
결재일자	2021. 2. 8.
공개여부	대시민공개
수 신 자	기획담당관

주무관	위탁개발팀장	공공개발추진반장	공공개발기획단장		결재
김진형	서신석	대결 02/08 이상면	전결
협 조

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호497번, 천준호의원, 국토교통위원회)

따로붙임 : 국회의원 요구자료 1부.  끝.

천준호의원(국토교통위원회, 더불어민주당 강북구갑)

요구번호 : 497번

- 강북어린이병원 및 공공청사 복합개발 현재 추진상황 및 향후 추진계획

□ 강북 어린이병원 및 공공청사 복합개발 현재 추진상황 및 향후 추진계획

○ 사업개요

- 위    치 : 서울시 강북구 번동 365-1번지(한천로 913) 외 5필지 일대

- 부지면적 : 16,365.3㎡(수도 2,757㎡, 도로ㆍ소방서 13,599㎡)

- 건물규모

․ 어린이병원 : 214병상, 12개 진료과, 지하3층 ~ 지상14층(48,507㎡)

․ 복 합 청 사 : 도로·수도사업소, 지하1층 ~ 지상8층(16,130㎡)

※ 강북소방서 : 기존시설 유지(5,356㎡)

- 사업기간 : 2019. 6. ~ 2026. 12.

- 총사업비 : 2,281억원(건물조성비: 2,258억원, 병원 운영비: 23억원)

※ 개략공사비 산정으로 사업추진 과정에서 변동 될 수 있음.

○ 추진상황

-  ’18. 8. : 동고동락 발표(동북권 어린이전문병원 건립 후보지 포함)

-  ’19. 8. : 어린이병원 복합개발 부지 확정(북부도로·수도사업소·강북소방서/시유지)

-  ’20. 8. : 복합개발 계획(안) 수립(어린이병원 + 복합청사)

-  ’20. 9. ~ : 타당성 조사 중(건설기술진흥법/서울연구원)

-  ’21. 1. : 타당성 조사 의뢰(지방재정법/한국지방행정연구원), 약정후 7개월소요

○ 향후계획

- ’21. 2. ~ 12. : 타당성조사(지방재정법), 투자심사(市)

- ’22. 1. ~12. : 공유재산심의, 관리계획 승인, 설계공모 및 실시설계

- ’22.12. : 기존건물 철거 및 공사 착공(복합청사 ’22. 12./ 어린이병원 ’24. 6. 단계별 추진)

- ’26.12. : 공사 준공

별첨 : 건립계획(안) 1부.  끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울시 ( 공공개발기획단)	담당사무관	서신석
	02-2133-8347	주무관	김진형
	작 성 일 : 2021. 2. 8.

[별첨]

강북어린이병원 공공청사 복합개발 건립계획(안)

□ 개  요

위 치	강북구 번동 365-1번지 외 5필지(16,365.30㎡)
건축규모	지하3층, 지상14층, (2개동)연면적 합계 69,992.9㎡
용 도	의료시설(병원), 공공청사(공공업무시설)
공사종별	(금회신축) 지하3층/지상14층, 연면적 64,637㎡		기존건물 존치
시설명	어린이병원	복합청사	소방서(기존)
층 수	지하3층/지상14층	지하1층/지상8층	지하1층/지상4층
연면적	48,507㎡	16,130㎡	5,355.9㎡
주차대수	497대(어린이병원: 366대, 복합청사: 131대)
건폐율	46.94%
용적률	248.65%

□ 배치개념도

□ 단면도 및 조감도