문서번호	도시철도설비부-1460
결재일자	2021. 2. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		설비계획과장	도시철도설비부장
전수철		장병선	02/09 김중영
협 조
	송변전과장			백성현
	차량과장			강치석
	신호과장			구봉서
	주무관			이원호

『하남선(5호선 연장) (강일역)』

영업시운전 승강장안전문시스템 점검 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 2.

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

『하남선(5호선 연장) (강일역)』

영업시운전 승강장안전문시스템 점검 계획 보고

하남선(5호선 연장) 2단계 H1구간(강일역) 영업시운전 기간에 승강장안전문시스템 점검을 시행하여 시설물 설치 및 동작 상태, 인터페이스(차량, 신호) 등을 확인·점검하여 2단계 개통대비에 만전을 기하고자 함.

1		영업시운전 개요

▢ 기    간 : ‘21.01.30.(토) ~ 02.26(금)

▢ 시험구간 : H1(강일역), H4(하남시청역) ~ H5(하남검단산역)

▢ 참여기관 : 서울교통공사(주관), 서울시 도시기반시설본부, 경기도 철도건설과

▢ 시운전 일정

연번	시험구간	시운전 기간	비고
1	H4(하남시청역) H5(하남검단산역)	‘21.01.30. ~ 02.19.	○ H1 강일역 무정차 통과 ○ 영업시간 내 시행
2	H1(강일역)	‘21.02.15. ~ 02.19.	○ 영업종료 후 ~ 04:00 시행

2		승강장안전문시스템 점검

▢ 일    시 : ‘21.02.15.(월) ~ 02.19.(금) 5일간

▢ 시    간 : 영업종료 후 01:00 ~ 04:00

▢ 구    간 : 강동역 ~ 하남풍산역

▢ 영업시운전 참여 인원

기관	15(월)	16(화)	17(수)	18(목)	19(금)	비고
계	12	11	13	10	10
교통공사(강동PSD관리소)	2	1	2	1	1
교통공사(승강장안전문관리단)	-	-	1	-	-
교통공사(신호2사업소)	1	1	1	1	1
서울시 도철설비부	2	2	2	1	1
차량전기(SE)	1	1	1	1	1
전차선(SE)	1	1	1	1	1
신호감리(SE)	1	1	1	1	1
기계감리	1	1	1	1	1
시공사(현대무벡스)	3	3	3	3	3

▢ 주요 점검 사항

구 분	점 검 내 용
설치상태 및 동작확인 점검	○ 주요 시설물 설치 및 동작 상태 - 종합제어반, 승무원안내장치, 장애물검지센서, 정위치센서, 각종 조작반 등 ○ 역무실, 승강장, 승무원 조작반 취급 및 표시 ○ 구동모터, 개별제어반, 잠금장치, 링크ASSY 등 기능 및 열림/닫힘 동작시험 ○ 전원장치 ATS, 정류기, 축전지 등 동작 및 표시 ○ 가동문, 비상문, 선로/승무원출입문 등 구조체 설치상태
인터페이스 점검	○ 열차 및 신호시스템 연동상태 ○ 열차 연동 시 종합제어반, 각종 조작반, 승무원안내장치 표시 ○ 열차 연동 시 각종 센서류(레이저거리측정 센서, 정위치, 진입·진출 등) 검지 및 표시

3		행정조치 및 향후 계획

▢ 시설물 합동점검 결과 조치

○ 시설물 동작 미비사항 발생시 현장조치

○ 인터페이스 동작 각분야별 개선사항은 시스템통합감리단 책임하에 업무 총괄 및 보고

▢ 2단계 영업시운전 종료 전 승강장안전문설비(PSD) 인수 인계

붙임  강일역 PSD 점검 체크리스트 1부.  끝.