코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	우리동네키움포털 콘텐츠 보강 및 운영 용역 월간보고(1월)

「2021년 우리동네키움포털 콘텐츠 보강 및 운영」용역관련 월간 수행 내역을 아래와 같이 보고 드립니다.

가. 사업개요

1) 사업기간 : 2021.1.1. ～ 12.31.

2) 수행업체 : ㈜제스아이앤씨

********************

나. 추진실적                               ※ 회의일정 : 매주 화요일 15시

구분

1월 실적(2021.1.1.~1.31.)

2월 계획

단계

진척

계획

7.52%

실적

5.14%

19%

업무

내역

【 거점형 온라인 서비스 】

1. 2호 거점형 키움센터 서비스 오픈 (1/4)

- 서비스 안내, 긴급돌봄 및 문화예술창작활동 예약

2. 1호 교구재 서비스 메뉴 추가 완료 (1/6)

- 서비스 안내 및 리스트 다운로드

3. 거점 돌봄예약 시 급식 신청기능 개발 완료 (1/19)

4. 일시돌봄 이용횟수 제한 기능 개발

- 거점형 대상 월 7회, 센터별 설정 기능

- 분석 및 설계완료

【 거점형 온라인 서비스 】

1. 일시돌봄 이용횟수 제한 기능 적용

2. 거점형 키움센터 종사자 요구사항 검토 및 분석

【 관리자 】

1. 종사자 교육현황 통계기능 추가

- 이수자 자격증별 신청·이수건수, 연차별, 센터별, 과정별, 직급별 등 이수현황 세부통계

- 설계완료 및 피드백(여가재단)

2. 아동 출결정보 수기 입력 기능 개발

- 누락된 출결정보 센터 관리자 입력 기능

- 분석 및 설계완료

3. 자치구 담당자 매뉴얼 현행화

【 관리자 】

1. 종사자 교육현황 통계기능 추가 개발 완료

2. 아동 출결정보 수기 입력 기능 적용

【 포털 】

1. 메인화면 이미지 교체 완료 (1/15)

2. 위탁채용 게시판 추가 및 메인화면 배치 (1/15)

【 포털 】

1. 웹접근성 마크 갱신 작업

- 게시물 및 소스 점검, 공인인증 기관 심사의뢰

2. 센터 입소서류 온라인 제출 기능 개발

- 요구사항 분석 및 파일보안 솔루션 적용기술 검토

운영

지원

1. 개발 및 오류수정

1) 센터 현황판 분기 오류수정, 거점형 키움센터 알림톡 오류 수정 등 총 14건 (작업보고서 첨부)

2. 장애처리 (첨부)

- 일시 : 1.29.(금) 0시 발생 (9시 확인)

- 내용 : 2021년 1분기 예약 불가

- 조치 : 오류 수정 및 1분기 예약일 익일로 수정

3. 월 시스템 점검 (첨부)

- WAS서버 및 DB 점검 실시

- 웹 접근성 및 호환성 점검 실시

1. 개발 및 오류수정

2. 월 시스템 점검

3. 센터 지원 문의사항

합계	시설관리	예약관리	출결관리	기타문의
222	0	110	43	69

4. 유지보수 현황

합계	과업	개선	디자인	오류	현행화
14	1	9	1	3	0

기타

사항

착수 보고회 개최 (1.20.)

붙임   1. 상세작업일정표(WBS)  1부.

2. 월간 및 주간 보고서 총 5부.

3. 작업내역서 14부.

4. 장애보고서 1부.

5. 센터지원내역 1부.

6. 유지보수 현황 1부.

7. 시스템 월점검 보고서 및 점검증빙자료 각 1부.  끝.

주무관	박지선		돌봄운영팀장	김성룡		아이돌봄담당관	02/05 김현미
협조자
시행	아이돌봄담당관-2106	(		)	접수		(		)
우		서울특별시 중구 세종대로 110	/
전화	02-2133-4817	/전송	02-2133-0733	/	happy_pjs@seoul.go.kr	/	부분공개(5)