코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	도시계획시설(남산1근린공원)사업의 변경에 따른 협의

1. 서울특별시 고시 제2018-157호(2018.5.17.)로 공원조성(변경)계획 결정 및 지형도면 고시된 남산1근린공원(중구 회현동1가 100-177번지 일대)내 “남산 회현자락 한양도성 현장유적박물관 조성” 사업에 대하여 서울특별시 고시 제2018-277호(2018.9.13.)로 도시계획시설(공원)사업 실시계획을 고시하고 진행중인 사업과 관련입니다.

2. 우리부서에서는 위 공원조성(변경)계획의 실시계획 고시내용과 같이 사업을 진행중 아래와 같이 일부 변경사항이 있어 검토(협의)를 요청드리니 진행중인 사업임을 감안하여 2021.2.17.한 검토의견을 회신해 주시기 바랍니다.

가. 사업규모 변경전·후

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
사업의 종류	도시계획시설(공원)사업	도시계획시설(공원)사업	변경없음
명 칭	남산 회현자락 한양도성 현장유적박물관 조성	남산 회현자락 한양도성 현장 유적박물관 조성
사업면적	43,630.7㎡	43,630.7㎡
사업규모 및 내용	· 보호각(유구보호 및 전시) 연면적 1,440.96㎡	· 보호각(유구보호 및 전시) 연면적 1,440.96㎡	최고높이(11.12m) 및 연면적 변경없이 공사완료
	· 인포센터(전시 및 관리실) 연면적 280.92㎡	· 인포센터(전시 및 관리실) 연면적 257.64㎡	면적감소(23.28㎡) (공사착공 전)
변경사유	기존 계획건물은 반지하형이므로 건물내부에 경사로가 길어 장애인 및 노약자의 접근 및 채광, 통풍, 환기에도 불리하여 지상층으로 변경하고자 하며, “한양도성의 토층전사”의 전시를 위한 일부공간(연면적의 약 1/10 부분)의 높이 증가가 필요함

나. 협의기관(부서)

- 공원조성과: 한양도성 유적전시관 사업내용중 인포센터의 규모 변경에 따른 검토의견

- 중부공원녹지사업소: 한양도성 유적전시관 사업내용중 인포센터의 규모 변경에 따른 검토의견

1. 인포센터(전시안내센터) 변경전·후 개요 및 도면 1부

2. 현황사진(보호각 및 착공예정지 현황 - 참고용) 1부.   끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	공원조성과장,중부공원녹지사업소장(시설과장)
주무관	왕승찬		도성관리팀장	이원재		한양도성도감과장	02/10 代윤용훈
협조자
시행	한양도성도감-1455	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 서울시청 서소문 청사 1동 5층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-2671	/전송	02-2133-1063	/	vivawang@seoul.go.kr	/	부분공개(5)